투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
(경유)
제목	교통안전시설 원인자부담공사(노면표시) 승인기간 연기 및 변경승인(2014-0204-013)

1. 방재시설부-883(2016.1.20.)호 및 교통관리과-223020(2015.08.10.)호와 관련입니다.

2. 귀 본부에서 요청한 교통안전시설물 원인자부담공사 승인기간 연기 및 변경승인요청에 대해 아래와 같이 승인하니, 「교통안전시설 설치공사 원인자 준수사항」 및 「노면표시 시방」에 맞게  설치하여 주시고 T-Gis시스템 입력 후 준공확인 요청하여 주시기 바랍니다.

가. 승인기간 연장

공 사 명		신이문빗물펌프장 앞(이문쌍용아파트 연동)-노면표시	비 고
공사기간	당초	2014.11.20 ~ 2014.12. 31.	공사관리번호 201-0204-013
	변경	2014.11.20. ~ 2016. 1. 27.
연기 사유		[비보호겸용 좌회전 신설]공사로 변경

나. 교통관리과-223020(2015. 8. 10)호에 의거 변경승인.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	박성민		도로보수과장	01/22 국중진
협조자	주무관	홍수종
시행	도로보수과-383	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41(용답동) 성동도로사업소 도로보수과	/
전화	2210-1539	/전송	2210-1549	/	sm7203@seoul.go.kr	/	대시민공개