문서번호	정수과-255
보존기간	년
결재일자	2016.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
백석현		하은경	01/22 오세영
협조
	주무관		변민용

과산화수소 구매계약 변경계획

2016.1.

과산화수소 구매계약 변경계획

고도산화공정에 사용하는 과산화수소 계약물량(130.94톤)을 소진하여, 현재 계약업체에 기존 단가로 계약기간을 연장 『2016년도 과산화수소 단가계약』 체결 전까지 소요량을 구매하고자 함

2015년 과산화수소 구매 계약현황

계약금액 : 금65,273,590원(금육천오백이십칠만삼천오백구십원)

단    가 : 498.5원/kg(부가세포함)

수    량 : 130.94톤/년

계약기간 : 2015.07.09 ~ 2016.2.15

계약업체 : 주식회사 에스엔  대표 한방희

계약변경 사유

2016년도 과산화수소 차기년도 계약까지(3월 초순, 예정) 『과산화수소 규격 등 납품시방서 타항』에 의거 현재 계약업체에 기존단가로 계약기간을 연장하여 소요량을 구매  → 증 26톤(12,961,000원)

변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
계약물량	130.94톤	156.94톤	증) 26톤
계약금액	65,273,590원	78,234,590원	증)12,961,000원
계약기간	2015.07.09~ 2016.2.15	2015.07.09~ 2016.3.15

붙임 :  합의서. 끝.