문서번호	하천관리과-1065
결재일자	2016.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
전문관	치수설비팀장	하천관리과장		물순환안전국장
김재웅	김중영	이진용		01/22 권기욱
협 조
	치수계획팀장		손경철

빗물펌프장 신․증설사업 추진현황 보고

2016. 01

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

빗물펌프장 신․증설사업 추진현황 보고

우리시 방재성능 목표기준인 30년 빈도(95mm/h) 확보를 위해   추진중인 빗물펌프장 신․증설사업 현황 및 향후 추진계획에 대한   검토 보고임.

Ⅰ		사업근거

○ 2011년 풍수해대책 종합결과 보고(행정1부시장 방침 제10269호-2011.10.26.)

○ 빗물펌프장 증설 1단계 사업완료 보고(행정2부시장 방침 제139호-2014.4.18.)

Ⅱ		그간의 추진경위

○ 2007. 06. ~ 2007. 11. : 빗물펌프장 능력향상 타당성 조사

○ 2007. 12. ~ 2011. 11. : 기본 및 실시설계용역 시행(41개소)

○ 2009. 01. ~ 2013. 09.  : 1단계 증설사업 완료(41개소 - 2,824억 원)

○ 2012. 12. ~ 현재        : 2단계 증설사업 시행 중(공릉2 등 39개소)

※ 2016. 1. 현재 : 완료 20개소, 공사중 8개소, 설계 완료 7개소, 계획 수립 4개소

Ⅲ		시설현황(설계빈도)

(2016. 01. 기준)

구 분	설 계 빈 도						비 고
	계	5년 이하	10년	20년	30년	50년
펌프장	116	2	29	4	77	4

※ 서울시 방재성능목표 : 30년 빈도(95mm/h) 이상 펌프장 81개소(69.8%)

Ⅳ		신․증설사업 추진

□ 사업 추진현황(‘16. 01.)

계	공사중	설계 완료	사업계획 수립 중	사업 보류․취소		비 고
				보 류	취 소
37	8	7	4	12	6	2개소 신설중 (도곡,한강교)

※ 보류 및 취소사유 : 배수개선사업(6개소) 및 재개발사업(4개소) 연계, 기타      가동빈도 저조 및 사유지내 위치,  방류수역 미확보 등의 사유로 현 단계 사업 시행        불가(세부내역 붙임 참조)

□ 사업 목표연도 조정(13개소)

대 상	목표연도 조정		조 정 사 유	비 고
	당 초	변경후
공릉2, 용두3	2015	2016	민원 및 사업계획 변경으로 공사 지연	공사중
한강교, 합정	2015	2017	민원 발생으로 공사 지연	공사중
도곡	2016	2017	민원 발생 및 재설계로 공사 착수 지연	공사중
상수,당인,박미,염창1,행당,한남	2016	2018	‘16년 사업 미착수(예산 미반영)	설계완료
서초, 금호	2016	-	강남역 배수개선대책 연계 및 사업성 부족	보류

□ 빗물펌프장 수량 조정

구 분	2015년	2016년	증․감 사유	비 고
빗물펌프장	114	116	조원동(320㎥), 신림2(800㎥) 율현(820㎥), 마곡2(2,600㎥)	4개소 신설
			율현1(120㎥), 율현2(120㎥)	2개소 폐쇄

Ⅴ		향후 추진계획

□ 추진방향

○ 서울시 방재성능목표 기준(95mm/h) 확보

- 현재 5~10년 빈도 → 30년 빈도(95mm/h)로 증설

○ 유역단위 방재계획 수립을 통한 효율적인 사업 추진

- 하수관거 정비사업과 연계, 사업 효율성 제고와 시설물의 유휴화 예방

- 유역 분리 및 저류조 설치 등 지역 여건에 맞는 방재시설 확충

□ 세부 추진내용(2020년 완료)

구 분	대 상	추 진 계 획	비 고
공사중	8	2017년까지 완료 (‘16년 5개소, ’17년 3개소) ․‘16년 : 공릉2, 용두3, 잠원2, 마곡1, 수서 ․‘17년 : 합정, 도곡, 한강교
설계완료	7	‘17년 착공 → ’18년 사업완료(6개소) ․상수, 당인, 박미, 염창1, 행당, 한남	잠원 향후 추진
사업계획 수립	4	‘17년 설계 착수 → ’20년 사업완료 ․중곡, 증산, 영등포, 신길

※ 사업 보류 대상(12개소)은 사유 해소시 개별적으로 사업 추진

□ 사업효과

○ ‘20년까지 103개소(86.5%) 30년 빈도 강우 대응능력 확보

▸‘15년(81개소) → ’17년(93개소) → ‘18년(99개소) → ’20년(103개소)

Ⅶ		행정사항

○ 유로 변경, 관거 정비, 택지개발사업 등 배수유역 변경에 따른 적정        방재능력 재검증을 위해 ‘17년 빗물펌프장 전수 타당성 조사용역 시행.

○ 현재 시행중인 배수시설 개선대책 및 풍수해저감 종합계획과 연계하여        빗물펌프장 신․증설계획 재정비.

붙임 : 1) 빗물펌프장 설계빈도 1부.

2) 빗물펌프장 사업 보류․취소내역 1부.

3) 빗물펌프장 공사 추진현황(2단계) 1부.  끝