문서번호	급수운영과-683
결재일자	2016.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
임준빈	최철민	이규상		01/23 정중곤
협 조
	주무관		김상신

’16년 아리수통합정보센터

고화질 영상통합감시장비 구축사업 추진계획

2016. 1.

상수도사업본부

(급수부 급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

’16년 아리수통합정보센터

고화질 영상통합감시장비 구축사업 추진계획

아리수통합정보센터에 고화질 CCTV 영상통합감시장비를 구축하여 시스템의 성능향상으로 상수도 주요시설물에 대한 이중감시체계를 강화코자 함.

□ 추진근거

○ 서울특별시 정보화사업 추진절차에 관한 규칙

○ 서울특별시 정보통신 보안업무 처리규칙

○ 아리수통합정보센터 영상감시시스템 통합장비 구축계획

- (급수운영과-4704, ’15. 7. 16.)

○ ’16년 정보화사업(신규분야) 예산타당성 심사결과(1차) 보냄

- (정보기획담당관-14304, ’15. 9. 9.)

□ 추진방향

○ 정수센터 □ 수도사업소의 고화질 CCTV 영상통합감시를 위한 기반시설 구축 - 기존 저화질 영상통합감시시스템 성능개선

디지털카메라(200만 화소급) : 정수센터 및 수도사업소 CCTV 카메라 교체 및 신설시 설치하고 있음

아나로그카메라(41만 화소급) : 카메라의 단종으로 현재는 설치되지 않고 있음

○ 영상통합감시시스템의 고성능 장비 확충으로 시스템의 성능향상 및 최적화 - 서버, 스위칭허브 등 네트워크장비 증설

○ 고화질 영상 전송방식(프로토콜) 통합기능을 지원하는 범용 운영체제(OS) 개발 - 시스템간 호환성 확보 및 S/W 업그레이드

프로토콜(Protocol) : 정보기기 사이(컴퓨터 간, 컴퓨터와 단말기 간 등)에서 데이터를     효율적으로 송□수신하기 위해 규칙이나 절차를 정한 국제적인 통신규약

□ 시설현황

○ 시스템 구축개요

- 취 □ 정수장, 배수지, 가압장에서 운영 중인 CCTV 영상을 분배하여 동일한 영상을 통합정보센터에 표출하여 이중감시토록 시스템 통합 구축

- 현장별로 상이한 CCTV 영상 전송방식(프로토콜)통합을 위해 통합

정보센터에 영상감시장비(H/W) 설치 및 감시프로그램(S/W) 개발 적용

○ 시스템 구축장비

장 비 명	계	정보센터	정 수 센 터						수 도 사 업 소
			광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북	중부	동부	북부	서부	강서	남부	강남	강동
뷰 어 서 버	5대	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
영상분배장치(VDA)	62대	-	-	10	10	2	20	16	-	-	-	-	-	-	-	4
영상전송장치(DVR)	20대	-	-	4	2	1	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-
영상전송장치(NVR)	6대	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1

※ 장비 미구축 장소는 현장의 기존 설치된 장비를 활용하여 CCTV 영상 수집 표출

□ 문 제 점

○ 고화질 CCTV 영상통합감시시스템 미구축

- 통합정보센터에 고화질 CCTV 영상을 수용하여 표출할 수 있는영상통합감시시스템(H/W, S/W) 미구축

※ 영상통합감시시스템 구축 당시 저화질 CCTV 영상만 표출할 수 있도록

장비(H/W) 설치 및 프로그램(S/W)이 개발되어 고화질 영상 표출 불가

○ 기존 CCTV 영상통합감시장비 호환성 저하

- 정수센터 □ 수도사업소에서 고화질 CCTV로 신설 또는 교체시 통합정보센터의 기존 통합감시장비와 호환 불가로 영상 미표출

※ 저화질 CCTV 제품의 단종으로 정수센터  □ 수도사업소에서 고화질 CCTV로

신설 및 교체 중

○ 기존 영상통합감시시스템 운영체제(OS) 취약

- 기존 영상통합감시시스템 운영체제(OS)는 일부 특정사 카메라의 영상 전송방식(프로토콜)을 통합하는 기능이 지원되지 않아 영상 표출 불가

□ 개선방안

○ 고화질 CCTV 영상통합감시시스템 구축

- 정수센터 □ 수도사업소에서 운영 중인 고화질 CCTV 영상을 수용하여

표출할 수 있도록 고화질 영상통합감시시스템(H/W, S/W) 구축

○ 기존 CCTV 영상통합감시장비 호환성 확보

- 고성능 통합감시장비 증설 및 프로그램(S/W)을 개발 적용하여 기존

저화질 CCTV 통합감시장비의 성능개선으로 시스템간 호환성 확보

※ 저화질 CCTV 영상과 고화질 CCTV 영상을 병행하여 감시 할 수 있는

통합감시프로그램(S/W) 개발

○ 영상통합감시시스템 운영체제(OS) 개선

- 카메라 제조사별로 상이한 영상 전송방식(프로토콜)을 통합하는 기능이 지원되는 범용 운영체제(OS)를 개발하여 시스템에 적용 구현

※ 특정사와 관계없이 모든 제품의 통합기능을 지원하는 표준 전송방식

(프로토콜)의 통합감시시스템 운영체계 구축

□ 추진내용

○ 고화질 영상통합감시시스템 구축사업 추진

- 사업개요 : 고화질 CCTV 영상통합감시 장비증설 및 프로그램 개발

□ H/W : 뷰어서버 6대, 스트리밍서버 26대, 스위칭허브 14대

□ S/W : 고화질 CCTV 영상통합감시 프로그램 개발 등 성능개선

- 사업기간 : ’15. ~ ’16.

- 총사업비 : 383,000천원

- 연도별 추진계획

구 분	’15년	’16년
통합장비 (H/W)	◦ 고화질 영상통합감시장비 증설 - 뷰어서버 4대 - 스트리밍서버 13대 - 스위칭허브 4대	◦ 고화질 영상통합감시장비 증설 - 뷰어서버 2대 - 스트리밍서버 13대 - 스위칭허브 10대
프로그램 (S/W)	◦ 고화질 CCTV 영상감시 S/W 개발 - 표준 프로토콜 사용으로 특정 제품과 관계없이 모두 호환	◦ 고화질 CCTV 영상감시 S/W 개발 - 표준 프로토콜 사용으로 특정 제품과 관계없이 모두 호환

구 분	’15년	’16년
개선대상	◦ 통합정보센터 ◦ 정수센터 : 4개소 - 구의, 영등포, 암사, 강북 ◦ 수도사업소 : 1개소 - 북부	◦ 통합정보센터 ◦ 정수센터 : 2개소 - 광암, 뚝도 ◦ 수도사업소 : 7개소 - 중부, 동부, 서부, 강서, 남부, 강남, 강동
소요예산	203,000천원	180,000천원

□ 추진계획(’16년)

○ 사 업 명 : 통합정보센터 고화질 영상통합감시시스템 구축사업

○ 사업개요

- H/W : 뷰어서버 2대, 스트리밍서버 13대, 스위칭허브 10대

- S/W : 고화질 CCTV 영상통합감시 프로그램 개발 구축

○ 사업기간 : ’16. 4. ~10.

○ 소요예산 : 180,000천원

- H/W(뷰어서버, 스트리밍서버, 스위칭허브 등) : 126,000천원

- S/W(감시프로그램 개발, 감시시스템 연계 등) :  54,000천원

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률)

- 중소기업자간 경제제품 이외의 물품 □ 용역은 1억원~2.1억원 경우

중기업 □ 소기업 □ 소상공인간 제한경쟁입찰

○ 추진일정

- ’16. 1. : 정보화사업 추진계획 수립

- ’16. 1 ~ 2. : 서울시 정보화사업 추진절차 이행 및 결과 반영

추진내용	관 련 규 정	검토기관
정보화사업 보안성 검토	서울시 정보통신 보안업무 처리규칙	정보통신보안담당관
과업내용서 사전검토	서울시 정보화사업 추진절차에 관한 규칙	정보기획담당관
과업내용서 사전공개	지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축 □ 운영지침	조달청 나라장터 서울시 홈페이지

- ’16. 3. : 계약심사 요청 및 완료(계약심사과)

- ’16. 3. : 사업발주 및 계약체결(재무과)

- ’16. 4. ~ 10. : 사업시행

□ 기대효과

○ 상수도 주요시설물 이상징후 발견, 신속대응 등 이중감시체계 강화

○ 고성능장비 증설로 시스템 성능향상을 통한 장애발생 최소화

붙 임 : 연도별 고화질 영상통합감시시스템 구축계획 1부. 끝.