문서번호	주차계획과-1135
결재일자	2016.1.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주차관리팀장	주차계획과장
최은정		이우종	01/25 윤보영
협조

공영(노상)주차장 확대 설치 운영 계획

2016. 1

주차계획과

공영(노상)주차장 확대 설치 운영 계획

서울시내 상습 불법주차 지역 중 교통 흐름에 영향을 주지 않은 지역에 공영(노상)주차장을 확대 설치 운영하고 이용시민에게 주차편의를 제공하고자 함

1		추진배경 및 경위

□ 추진배경

○ 다각적인 주차가능지역 확보 노력에도 불구하고 주차공간 부족으로 인한 주차무질서, 불법 주정차 지역 증가

- 불법주정차 단속건수 : ’12년(2,709천건) → ’14년(3,015천건) 11% 증가

- 노상주차 임시허용 : ’12년(184건) → ’14년(214건) 16% 증가

○ 도심내 공영주차장 건설은 부지 확보 곤란 및 건설비용 과다 소요

- 1면당 11.5㎡, 차로 포함시 23.0㎡(직각주차시) 면적소요

- 도심내 1면당 평균 건설비용은 약 50백만원

□ 추진경위

○ ‘15.8~9   공영(노상)주차장 설치가능 지역 검토 및 발굴(자치구 협의)

○ ‘15.9.11   공영(노상)주차장 가능 지역 후보지 선정 및 보고(시장)

※ 후보지 51개소 1,708면(시도 27개소 747면 / 구도 24개소 961면)

○ ‘15.10.8   도심 내 불법주차 지역 노상주차장 확충계획 수립

○ ‘15.10~12  신규 발굴 주차장 경찰청 규제 심의 및 후보지 지속발굴

※ 2015년 발굴 후보지 1,708면 중 1,508면 규제심의 미통과, 232면 기운영

○ ‘16.1.      공영(노상)주차장 신규 조성(13개소 418면) 보고(시장)

2		세부 추진계획

□ 대상주차장 : 13개소 418면(소형407면, 대형 11면)

○ 소형차량

- 은평 1개소 22면, 강북 1개소 30면, 중랑 1개소 30면, 양천 2개소 77면, 구로 2개소 57면, 강서 1개소 72면, 동작 2개소 102면, 중구 1개소 17면

○ 대형차량 : 서대문 1개소 3면, 강서 1개소 8면

※ 시도 8개소 243면 / 구도 5개소 175면

□ 추진방법 : 도로관리기관별, 설치 및 운영 가능 시기별로 단계별 운영 추진

○ 시도설치 노상주차장 : 서울특별시설관리공단 운영(8개소 243면)

※ 위탁근거 : 서울특별시 주차장설치 및 관리조례 제10조 제1항 제1호

- 1단계(1월~) : 주차선 구획만으로 즉시설치 가능 주차장(6개소 136면)

· 대  상 : 중앙로 공영주차장(56면), 진흥로 공영주차장(22면), 모래내로 공영주차장(3면), 방화대로 공영주차장(8면), 도봉로15길 공영주차장(30면), 마른내로 공영주차장(17면)

- 2단계(4월~) : 이해관계자(학교 등) 설득, 조도개선 필요 주차장(2개소 107면)

· 대   상 : 방화로 공영주차장(72면), 구로거리공원 공영주차장(35면)

○ 구도설치 노상주차장 : 관할 자치구 설치 및 운영(5개소 175면)

- 동작 2개소 102면 / 중랑 1개소 30면 / 양천 1개소 21면 / 구로 1개소 22면

□ 운영방안

○ 설치운영일 : 2016. 2. 1~

○ 주차요금 : 서울특별시 주차장 설치 및 관리조례에 의거 주변 주차수요 등을 고려하여 주차급지 행정예고 후 요금 부과

- 주차장 내에 사각지대 방지, 시설 안전관리 및 화재방지를 위해 필요시 영상정보처리기기(CCTV) 설치 추진

※ 개인정보 보호법 시행령 제23조제1항제1호 :「행정절차법」에 따른 행정예고의 실시 또는 의견청취

○ 운영시간 : 주중 09:00~18:00(토요일 및 공휴일 무료개방)

○ 운영방법

- 운영인력 : 주차관리원(기간제)

⇒ 신설 공영(노상)주차장 근무자는 주차관리 능력 및 민원응대가 우수 직원으로 배치

- 운영방법 : 기존 PDA에서 스마트폰으로 기기 및 관리시스템 변경하여 시범운영

<스마트폰 주차관리시스템 시범운영>

○ 대상주차장 : 신규설치 노상주차장 8개소(기 운영 주차장 1개소 포함)

○ 계약방법 : 수의계약

○ 계약기간 : 2016.2.1~2016.10.31(9개월)

○ 추진내용

- 입출차 정보 수기입력에서 카메라 자동인식으로 자동화하여 처리속도 향상

- 정기권, 요금정산관리 정확도 향상

○ 소요금액 : 금15,000천원 이내(부가가치세 별도)

○ 시범운영 평가기간 : 2016.7.1.~8.31(2개월)

○ 평가결과 활용계획 : 시범운영을 통해 주차장 관리 우수기능 도출, 서울시 노상주차장 관리시스템 규격 반영 등

○ 신규노상주차장 추가 발굴

- 노상주차장 설치 추천 온라인 접수 창구 개설 및 자치구 협력체계 구축

· SNS, 전광판, 반상회보, 보도자료 등을 통한 노상주차장 추천 홍보

□ 홍보계획

○ 홍보기간 : 2016. 2.1. ~ 3.31

○ 홍보매체 : 온/오프라인 매체를 통한 지속적인 홍보

- 영상매체 : 지하철 역사/전동차, 시내버스, 옥외전광판 표출 등

- 인 쇄 물 : 서울사랑, 내친구 서울, 자치구 소식지 등

- 온 라 인 : 홈페이지, 블로그(서울마니아, 서울나들이), 시민참여 홈페이지 등

○ 사후관리 : 언론동향 및 온라인 설문조사(엠보팅)을 통한 시민 반응 확인

3		소요예산

□ 소요예산 : 금 175,000천원

○ 스마트폰 주차관리시스템 시범운영 :15,000천원(자산취득비)

- 8개소 × 1,875천원 = 15,000천원(부가가치세 별도)

○ 주차부스 제작 설치 및 주차면 도색 등 : 160,000천원(민간위탁금)

- 8개소 × 20,000천원 = 160,000천원

4		향후계획

○ ’16.1~   주차부스 제작 및 설치, 주차면 도색(공단)

○ ’16.2~   신설 노상주차장 홍보 및 후보지 추천 웹사이트 개설(市)

○ ’16.2~   신설 노상주차장 운영, 모니터링 및 추가 발굴 지속 실시(市,공단)

신설 공영(노상)주차장 현황 및 주차급지

연번	관할구	주차장명 (운영단계)	위치	설치 면수	급지	주차대상 차 량
합 계				243
1	은평	진흥로 공영주차장	서오릉로 63	22	3급지	소형차
2	강북	도봉로15길 공영주차장	미아동 458-7	30	3급지	소형차
3	양천	중앙로 공영주차장	목동APT 108동 건너	56	3급지	소형차
4	강서	방화로 공영주차장	방화동 768-1 일대	72	4급지	소형차
5	서대문	모래내로 공영주차장	홍은동 277-1	3	3급지 (무료)	대형차량
6	강서	방화대로 공영주차장	외발산동 423-10	8	4급지 (무료)	대형차량
7	구로	구로거리공원 공영주차장	구로동 50 일대	35	3급지	소형차
8	중구	마른내로 공영주차장	마른내로 111 일대	17	1급지	소형차