문서번호	설비부-1149
결재일자	2016.1.25.
공개여부	부분공개(6 7)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박경철		임현근	전결 01/25 권오식
협조

'동부간선도로확장(3공구)’

하도급 변경계약(공기연기) 검토보고

2016. 01.

도시기반시설본부

설비부

‘동부간선도로확장공사(3공구)’

하도급 변경계약 (공기연기) 검토보고

‘동부간선도로 확장공사(3공구)’와 관련, 책임건설사업관리기술자로부터 제출된 기계분야 공사기간 변경에 따른 하도급 계약변경 내용을 검토하고 아래와 같이 보고드림.

1		하도급 계약 현황

공 사 명	동부간선도로확장공사(3공구)	하도급 공종	기계설비(소방포함)
원도급액	278,597,600원	하도급 공사기간	’15.04.27. ~ ’15.12.31.
하도급액	269,500,000원	하도급율(%)	96.73
수 급 인	세원건설(주)	하수급인	㈜제일엠에스씨

2		하도급 검토 내용

□ 관련 근거

-‘건설공사 하도급 변경계약 보고(기계설비공사)’ 동삼감 제2016-8호(2016.01.20.)

□ 하도급 변경사항                                          (단위 : 천원)

하도급 공사명	하도급 업체명	하도급 공사기간		원도급액	하도급액	하도급율(%)	비고
기계설비	㈜제일 엠에스씨	당 초	2015.04.27. ~ 2015.12.31.	278,597	269,500	96.73	-금액변경 없음 -공사기간 변경
		변 경	2015.04.27. ~ 2017.12.31.	278,597	269,500	96.73

□ 책임건설사업관리기술자 검토내용

구 분	검토사항	검토내용		검토결과	비 고
하 도 급 자 격	업 종	기계설비공사업		적정	건설산업기본법 제25조
하도급 통지 기간 준수	공기기간	당초 : 2015.4.27.~ 2015.12.31. 변경 : 2015.4.27.~ 2017.12.15.		적정	건설산업기본법 시행령 제32조
	계 약 후 30일이내	계 약 일	2015.11.30.
		통 보 일	2015.12.28.
하도급율	82%미만 여부	원도급금액	278,597,000원	적정	건설산업기본법 제31조 및 건설산업기본법시행규칙 제27조2의 심사대상이 아님
		하도급금액	269,500,000원
		하도급율	96.73%
하 도 급 계 약 서	적정성 여부	작성함		적정	건설산업기본법 시행규칙 제26조
하 도 급 내 역 서	작성 여부	작성함		적정	〃
예정공정표	작성 여부	작성함		적정	〃

3		검토 의견

□ 책임건설사업관리자로부터 검토 제출된 내용이 관련 규정에 적정한 것으로 판단되므로, 하도급 변경계약 내용을 관련 부서(건설총괄부, 토목부)에 통보하고,

□ 책임건설사업관리자에 하도급 및 품질관리를 철저히 하도록 업무지시 하고자 함.

붙 임 : 하도급 변경계약 관련서류 1부.  끝.