문서번호	도시철도사업부-809
결재일자	2016.1.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
주무관		경전철1과장		도시철도사업부장
임병길		代위성환		01/25 권영찬
협 조
	경전철2과장				최광무
	주무관				조규영
	주무관				안창호
	주무관				위성환

-우이~신설 민간투자사업 부대공사 적기완공을 위한-

특별 공정회의 개최결과 보고(1회)

2016. 1.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 우이~신설 민간투자사업 부대공사 적기완공을 위한 -

특별 공정회의 개최결과 보고(1회)

우이-신설 도시철도 부대공사(출입구, 환기구, 도로포장)적기완공을 위해 사업시행자와 격주 단위로 ‘특별 공정관리 회의’를 개최하고 결과를 보고 드림

□ 회의 개요

〇 일    시 : ´16. 1. 20(수) 14:00~16:00

〇 장    소 : 도시철도사업부 회의실 (9층)

〇 참 석 자 : 16명

- 본  부 : 경전철1, 2과장, 담당 주무관

- 사업자 : 건설사업단장, 법인(기술팀장), 1~4공구(책임감리원 및 현장소장)

□ 회의결과

〇 각 공구별 부대공사 추진현황

	<주 요 내 용>
○ 1,2공구 부대공사(출입구, 환기구, 도로포장)는 계획공정 준수하여 정상 추진중에 있음 (′16. 8월말 부대공사 완료) ○ 3공구 L09정거장 2번 출입구는 주변상가(무봉리 순대국, 임금님 짜장면 등)의 영업피해 보상민원으로 공정추진이 다소 부진하나, 계획공정 목표달성으로 ′16.9월말 까지 완료 ○ 4공구 L11정거장 5번 출입구(성신여대입구역)는 현재 수립된 공정계획에 의거 실착공이′16.7월초 가능하며, ′16.9월말 까지 공사가 마무리 될 수 있도록 돌관 공사 등 공기단축 방안을 마련하여 추진 독려

□ 공정보고 사항

【우이 1공구】- 현공정(토목): 96.2%

〇 현장소장(이선우)

- 차량기지와 L01～L03 정거장 출입구, 환기구, 포장 등 부대공사 정상 추진중에 있음

- 세부 추진일정

․′16년 1월 ～ 3월말 : 외부출입구(#1,#2) 구조물 공사

․′16년 4월 ～ 6월말 : 에스컬레이터(E/S) 제작 및 설치

․′16년 7월 ～ 8월말 : 출입구 캐노피 설치 및 기층포장 완료

※ 표층포장 및 차선도색은 준공직전 마무리 예정(′16년 10～11월)

〇 책임감리원 (홍명기)

- 차량기지 구조물(3번 환기구)은 1월말까지 완료하고 도로복구

- L01～L03 도로복구를 위해 H-Pile 제거 및 되메우기 작업 추진

- 시스템(송변전, 전차선, AFC,신호) 및 시운전 등 후속공종에 차질이 없이 추진

【우이 2공구】 - 현공정(토목): 95.8%

〇 현장소장(신현승)

- L04～L07 정거장 출입구, 환기구, 도로복구 등 부대공사 정상 추진중에 있음

- 세부 추진일정

․′16년.1월 ～ 4월말    : 외부출입구(#1,#2) 구조물 공사

․′16년.4월 ～ 7월 중순 : 에스컬레이터(E/S)  제작 및 설치

․′16년.5월 ～ 8월말    : 출입구 캐노피 설치 및 포장복구 완료

※ 강북구청 하수BOX 보수 일정에 따라 가시설 철거 및 지장물 단계별 복구

〇 책임감리원 (박기만)

- 부대공정이 가장 늦은 L07 정거장(#1) 에스컬레이터(E/S)는 4월초에 제작의뢰하여 7월 중순 설치하고, 캐노피 제작 및 설치는 8월말까지 완료

【우이 3공구】 - 현공정(토목): 89.7%

○ 현장소장 (이광연)

- L08～L10 정거장 출입구, 환기구 등 부대공사 정상 추진중에 있음

- 세부 추진일정

․′16년 1월 ～ 7월말 : 외부출입구 구조물 공사

․′16년 4월 ～ 8월말 : 에스컬레이터(E/S) 제작 및 설치

․′16년 7월 ～ 9월말 : 출입구 캐노피 설치 및 포장복구 완료

○ 책임감리원 (박득균)

- L08정거장 외부 출입구(#1,#2) 굴착 및 흙막이 공사 정상 추진

- L09 정거장 외부출입구(#2)무봉리 순대국 앞 복공판 설치 후 토공 작업 중

- L10정거장 외부 출입구(#2) 지하2층 경사구간 철근조립 작업 추진

※ L09 정거장 주변 임차인(임금님 짜장면)이 영업피해 보상 등 민원제기하고 있으나, 강북지역 교통여건 개선을 위한 공공사업임을 이해 설득하며 단계별 공사진행 중 (1월말 줄파기 작업실시)

【우이 4공구】- 현공정(토목): 91.8%

○ 현장소장(임철순)

- L11～L13 정거장 부대공사(출입구, 환기구, 도로포장 등) 정상 진행중에 있음

- 세부 추진일정

․′16년 1월 ～ 7월 중순 : 외부출입구 구조물 공사

․′16년 6월 ～ 9월 중순 : 엘리베이터(E/V) 제작 및 설치

․′16년 7월 ～ 9월말    : 옥외시설물 및 건축마감

○ 책임감리원(김대연)

- L11정거장 연결통로(출입구#5)는 유관부서(서울메트로) 업무협의 진행 중이며, ‘16. 7월초 실착공 가능하나, 주․야간 등 돌관작업으로 목표공기 준수

- L12정거장 연결통로(출입구#5,#6)는 도시철도공사와 협의 중이며, 3월초 착수

- L13정거장 외부출입구(E/V)를 ‘16. 2월말 구조물공사 착수하여 6월말 완료

□ 사업시행자 (건설사업단장)

○ 우선 시운전 구간(차량기지～L04)의 건축한계 (이격거리 150～200mm)에 신호설비 및 송수관로가 저촉되어 보완 또는 재시공 예정이며, 추후 설계, 시공, 감리사 합동점검으로 시공오차에 대한 원인규명 예정

○ 잔여 본선 구간에 대해서도 건축한계 측정하여 저촉여부를 확인하겠음

□ 본부 당부사항

○ 책임감리원 및 시공사 공정계획 검토결과′16.9월까지 모든 공사가 완료되는 것으로 공정보고 하였으나,

○ 사업자가 추가 공기연장 요구(′16.11월⇒′17.3월)한 상태로서 토목 및 정거장(건축, 기계, 설비분야) 추가 공기지연이 없도록 격주간(월 2회)□특별 공정관리회의□개최하여 공정관리

붙 임   1) 공정회의 자료(1~4공구) 1부.

2) 격주간 공정회의 참석자 명단 1부.  끝.