문서번호	보라매공원관리사무소-402
결재일자	2014.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	보라매공원관리사무소장		동부공원녹지사업소장
임종필	백운도	오대근		01/22 이춘희
협 조
	공원운영과장		이상용

보라매공원 인공암벽 등반장 재정비사업 추진계획

2014. 1.

동부공원녹지사업소

[보라매공원]

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 ■ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 ■	(		)	무 □

보라매공원 인공암벽 등반장 재정비사업 추진계획

2004년 시설된 인공암벽 등반장이 노후되어 이용시민의 안전사고 발생이 예상되고 지속적인 민원이 발생됨에 따라 재정비를 통하여 공원 이용객에게 쾌적한 공원 환경 및 편익을 제공하고자 보고 드림.

□ 추진 방향

○ 노후된 인공암벽 등반장을 재정비하여 민원 해소 및 공원 이용 활성화 도모

○ 공원 시설물 현대화를 통한 시민 만족도 향상 및 쾌적한 공원 환경 유지

□ 시설물 현황

○ 인공암벽 등반장 개요

- 조성년도 : 2004년

- 면적면적 : 480㎡(높이 15.5m, 폭 15m)

- 등반코스 : 3면

- 구    조 : 철골, FRP판넬 구조

- 개장시간 : 매일 10:00~17:00(겨울철 안전사고 예방차원에서 동절기 4개월 휴무)

- 이용방법 : 공원이용객 누구나 직접방문하여 참여

- 이용인원 : 1,000명 / 년

○ 문제점

- 인공암벽 등반장 시설년도가 10년 정도로 암벽판넬이 노후되어 판넬에 고정된          볼트가 빠지는 일이 발생되고 있어 인명사고 우려가 높음

- 인공암벽 등반장 시설물 노후화에 따른 이용객 저감 및 공원이용의 효율성 저하

- 지속적인 인터넷민원 등 민원이 제기되었으며, 시정 신뢰 저하의 요인으로 작용

○ 해결 방안

- 인공암벽 등반장의 구조물, F.R.P 등반판넬, 탄성포장, 휴게시설 등 시설물 재정비

- 상반기중 정비 완료하여 이용 시민 만족도 향상 및 공원 시설물의 유지관리에          만전을 기하고자 함

○ 타구 재정비 사례 비교

인공암벽 등반장명	최초 개장일	재정비 시행일	소요금액 (백만원)	비 고
보라매공원 인공암벽 등반장	2004년 3월	2014년 예정	300
당고개 암벽등반장(노원구)	2001년 9월	2011년 12월	270

- 노원구 암벽등반장의 경우 등반패널 설치는 관급자재 조달구매(총액계약), 기타

구조물 공사, 포장공사는 전자공개수의계약으로 시행하였음

□ 추진 계획

○ 대    상 : 보라매공원 인공암벽 등반장 480㎡

○ 내    용 : 인공암벽 등반장 재정비, 탄성포장, 휴게시설 설치 등

○ 사업기간 : 2014. 1 ~ 6월

○ 사 업 비 : 300백만원

시설명	공 종	물 량	소요금액(천원)	비 고
합 계			300,000
인공암벽 등반장	구조물 재설치	335㎡	60,300
	F.R.P 등반 판넬 설치	335장	201,000
	탄성포장	360㎡	36,300
	휴게시설(등의자)	6개	2,400

- 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화지원,

공원관리및도시녹화지원, 보라매공원시설물정비, 시설비및부대비, 시설비

○ 향후계획

- 2014. 1월

• 관련기관 협의, 현장조사, 실시설계 타당성 심사의뢰, 실시설계 발주

- 2014. 2월

• 실시설계용역 완료 및 공사발주

• 판넬 조달구매(총액계약) 요청

- 2014. 3 ~ 5월 : 공사 착 ․ 준공

- 2014. 6월 : 인공암벽 등반장 개장

□ 현황사진

[판넬 노후화에 따른 홀드 탈락]	[홀드 고정볼트 파손]

[홀드 노후화에 따른 파손]	[홀드 훼손]