투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 변경 승인(강남보금자리주택지구)

1. 도로보수과-8061(‘12.12.24)호 및 한국토지주택공사 강남사업단-5427831호(2013.11.19)와 관련입니다.

2. 한국토지주택공사에서 시행중인 『강남보금자리주택지구 부지조성공사』  교통안전시설(노면표지) 원인자부담 공사와 관련하여 다음과 같이 공사기간 변경을 승인하오니,

3. 원인자는 『원인자 준수사항』 및 『노면표시 시방서』에 의거 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바라며, 유관기관에서는 본 승인 통보내용을 참고하시기 바랍니다.

가. 변경사항

공사명	구분	설계사	감리사	시공사	공사기간변경
					당초	변경
강남보금자리주택지구 부지조성공사 교통안전시설물(노면표시) 원인자부담공사	노면표시	㈜건영이앤씨	㈜영호이앤씨	경태견설(주)	‘12.09.01 ~‘13.12.31	‘12.09.01 ~‘14.09.30

나. 변경사유 : 시설물 인계인수 관련 추가요구사항 및 점검사항 조치일정 고려. 끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
수신자	한국토지주택공사 사장,강남구청장(교통정책과장),서울수서경찰서장(교통과장)
★주무관	유현선		주무관	代김종범		도로보수과장	01/22 손수희
협조자
시행	도로보수과-468	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33(대치동 2번지)	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개