문서번호	조경과-1023
결재일자	2014.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장
배규중	김수영	01/23 이원영

- 서울의 사연있는 나무이야기 e-book 제작 용역 -

용역기간 연장 검토 보고

2014. 1.

조  경  과

- 서울의 사연있는 나무이야기 e-book 제작 용역 -

용역기간 연장 검토 보고

“서울의 사연있는 나무이야기 e-book 제작 용역” 추진중 용역기간 연장사유가 발생하여 다음과 같이 용역기간을 연장하고자 합니다.

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 서울의 사연있는 나무이야기 e-book 제작 용역

□ 기    간 : 2013. 10. 15 ~ 2014. 02. 10

□ 과업내용 : e-book 제작을 위한 기획․편집디자인 등 전 과정

□ 도 급 액 : 금21,560,000원(금이천일백오십육만원)

□ 도 급 자 : 주식회사 디자인하늘소

□ 공 정 률 : 80%

Ⅱ		용역기간 연장

□ 연장내용

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간	2013. 10. 15 ~ 2014. 02. 10	2013. 10. 15 ~ 2014. 03. 31	49일 연장

□ 연장사유

○ 디자인심의 등 관련 절차 이행에 따른 기간 소요

○ 성과품 품질 향상을 위한 전문작가의 세밀화 그림 추가 및 원고 작성 등에 기간 소요

□ 귀책사유 : 서울시

□ 지체상금 부과 여부 : 미부과

Ⅲ		항후계획

○ 상기와 같이 계약부서(재무과)에 용역기간 연장 계약 의뢰하고

○ 용역 추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 용역기간 연장 요청 문서 1부.  끝