문서번호	설비부-842
결재일자	2014.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
김원태		이흥복	01/23 박기형
협조

『동부간선도로 확장(3공구) 전기공사』

관급자재 수급계획 및 구매방법 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1.

서울시도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『동부간선도로 확장(3공구) 전기공사』

관급자재 수급계획 및 구매방법 검토보고

우리본부에서 시행중인 「동부간선도로 확장(3공구) 전기공사」 에 소요되는 관급자재(가로등 조명설비)의 수급계획 및 구매방법에 대한 검토보고임.

관련근거

□ 동삼감 제2014-13(2014.01.20.)호 : 관급자재 구매요청『동부간선도로 확장3공구 전기공사』

□ 설비부-12886(2013.11.28.)호 : 캔틸레버구간 가로등설치 검토보고

공사개요

□ 공 사 명 : 동부간선도로 확장(3공구) 전기공사

□ 공사규모 : 상계주공16단지~의정부 시계간 2.25km, 지하차도 2개소

지하차도 전기설비 1식 및 가로등주 172본

□ 공사기간 : 2008. 06. 26 ～ 2013. 12. 31

□ 공 사 비 : 2,675백만원(도급비 1,607백만원, 관급비 1,052백만원, 한전 16백만원)

□ 시 공 사 : ㈜정등전력 대표 김병갑

□ 감 리 사 : 동부엔지니어링(주)

관급자재 수급계획 및 구매검토

□ 구매사유

•동부간선도로 확장3공구 전구간(2.25km) 방음벽설치 계획에 따라 가로등 43본 및 터널등기구 53개 신설관련,

•우선 시공구간인 수락초‧중교 구간(280m)에 대한 가로등(5본), 터널등기구(7개) 및 캔틸레버 4차선 구간 2등용 ARM(13개) 구매필요

□ 품목별 구매현황

품 명	규 격	단위	총계	구매현황			잔량	비고
				전회	금회	누계
가로등주	9m - 1등용	본	123	35	5	40	83
	9m - 2등용	본	31	13	-	13	18
	5m - 1등용	본	18	-	-	-	18
ARM	1등용	개	141	48	-	48	93	8개 철거 및 보관
	2등용	개	31	-	13	13	18
등기구	컷오프형	개	203	48	18	66	137
램프/ 안정기	CDM 250W	조	153	48	18	66	87
	CDM 350W	조	50	-	-	-	50
터널등기구		개	53	-	7	7	46
램프/안정기	CDM 250W	조	53	-	7	7	46

□ 소요금액

품 명	규 격	단위	수량	단가	금액	비고
가로등주	9m - 2등용	본	5	540,000	2,700,000	21678172
ARM	2등용	개	13	470,000	6,110,000	21514671
등기구	컷오프형(신종로)	개	18	295,000	5,310,000	20879196
램프	CDM 250W	개	25	59,000	1,475,000	21562387
안정기	CDM 250W	개	25	30,300	757,500	21575307
터널등기구		개	7	207,000	1,449,000	22215181
소계					17,801,500
조달수수료	0.54%	식	1		96,120
계					17,897,620

※ 부가세 및 조달수수료 포함

□ 구매방법 : 조달사업에 관한법률 시행령 제9조의3 제1항 제2호에 의거 제3자 단가계약(MAS)으로 구매

조치 의견

□ 선행공정인 토목공사 공정에 맞춰 전기공사의 추진하기 위하여 관급자재를 적시에 구매 및 조달코자 함.

향후계획

□ 2014. 01. : 관급자재 구매의뢰

□ 2014. 02. : 제작납품

□ 2014. 04. : 설치완료

□ 2014. 12. : 4차공사 준공

따로붙임  1. 관급자재 구매요청  1부.

2. 캔틸레버구간 가로등설치 검토보고 1부.   끝.