출 장 결 과 보 고 서

주무관		설비공사과장	도시철도설비부장			결재
김경일		김호성	전결 01/23 정찬웅
협 조

	명에 의하여 2014. 1. 22. 도시철도건설과 관련하여 9호선 3단계 922공구 공사현장에 출장하여 공정보고 및 현황사항에 대한 협의하고 아래와 같이 보고합니다.
2014. 1. 23.
보 고 자 : 공업7급 성명 : 김경일

보       고       내       용

일    시

'14. 1. 22.(수) 13:00～17:30

건    명

출장결과보고(도시철도설비부장, 설비공사과장, 김경일)

내용

○ 출 장 지 : 9호선 3단계 922공구 공사현장

○ 출장목적 : 9호선 3단계 공정보고 및 현안사항 협의

○ 출 장 자 : 도시철도설비부장, 설비공사과장, 김경일

○ 현황보고 대상 : 9호선 3단계 3개공구 (921공구, 922공구, 923공구)

○ 공정보고

구 분	921공구		922공구	923공구
공정율(토목)	34%		34%	34%
기계설비 착공시기	2015년 하반기		2015년 하반기	2015년 하반기
지열천공시기	935정거장	936정거장	937정거장	938정거장
	‘14년 천공완료	‘15년 상반기	2014.2월	지열 미반영

○ 협안사항

- 정거장 임대상가 확충에 따른 기계설비분야 시설검토

- 변전실 등 기능실 송풍기 용량변경 추진 : 923공구

○ 관련사진

비  고