문서번호	교량보수과-360
결재일자	2014.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	동부도로사업소장
나철흠		김환겸	01/23 송영배
협 조
	주무관			윤철식
	주무관			조장호
	주무관			배상현

2014년도 예산사업(공사/용역)시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부도로사업소

(교량보수과)

2014년도 예산사업(공사•용역) 시행계획

2014년도 발주대상 사업(공사∙용역)에 대한 세부추진계획을 수립하여 효율적 업무추진으로 계획된 일정에 따라 사업추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		사업개요

발주대상

공 종		사업내용	건수	예산액(천원)	비 고
합 계				6,135,687
공 사	소 계	시설물 유지보수 1식	6	4,884,000
	연 간 단 가		2	1,854,000
	단 일 사 업		4	3,030,000
용 역	소 계	구조적 안전성평가	18	1,251,687
	정밀안전진단		2	898,800
	정 밀 점 검		16	352,887

사업별 세부내역

❍ 공 사

연번	사 업 명	사 업 내 용	예산액(천원)	비고
합 계	6 건		4,884,000
1	한강교량 일상유지보수공사	교면포장,콘크리트면보수 신축이음보수,도장	1,288,000
2	자동차전용도로 일상유지보수공사	절삭포장,상판․도장보수 단면보수,신축이음 보수	566,000
3	잠실철교(도로교) 보수공사	도장공사	880,000
4	탄천 1고가교 보수 및 포장개량공사	교면방수,교면포장 콘크리트균열보수	1,000,000
5	탄천 2고가교 보수 및 포장개량공사		1,000,000
6	한강교량 긴급복구 비축자재 정비	도장공사	150,000

❍ 용  역

- 정밀안전진단

연번	시 설 명	시설개요	예산액(천원)	비고
1	잠 실 대 교	준공일 : 2004.2.20.(성능개선) - 규 모 : B=35m L=1,280m	296,600
2	탄천2고가교	준공일 : 1999.7.11 규 모 : B=26~40m, L=3,640m	602,200

- 정밀(하자)점검                                           (단위:천원)

연번	시 설 명	시설개요	예산액	연번	시 설 명	시설개요	예산액	비고
1	올림픽대교	B=30,L=1,470m	90,546	9	하행 2교	B=17,L= 15m	4,640
2	상행 1교	B=17,L= 70m	17,341	10	하행 4교	B=17,L= 20m	6,083	하자
3	상행 2교	B=17,L= 20m	6,083	11	내곡I.C교	B=40,L=200m	56,844
4	상행 3교	B=17,L= 40m	12,017	12	탄천1고가교	B=21,L=1,366m	78,303
5	상행 4교	B=17,L= 15m	4,640	13	개포지하차도	B=17,L=135m	4,377
6	고덕천교	B=35,L= 54m	18,065	14	일원지하차도	B=25,L=160m	17,845
7	한 남 대 교 남단 2교	B=7.7, L=140m	12,084	15	수서지하차도	B=21,L= 90m	10,138
8	하행 1교	B=17,L= 40m	12,017	16	암사지하차도	B=18,L= 53m	1,864

Ⅱ		추 진 계 획

추진방향

❍ 공사의 경우 동일 공종이거나 인접한 사업은 효율적 사업추진을 위해 통합발주

❍ 용역사업은 현장의 노선상황과 점검종류를 고려하여 통합발주

사업별 세부추진계획

❍ 공 사

사 업 명	예산액 (백만원)	사업기간	담당자	비 고
6 건	4,884
한강교량 일상유지보수공사	1,288	’14.03~’15.02	조장호
자동차전용도로 일상유지보수공사	566	’14.03~’15.02	윤철식
잠실철교(도로교) 보수공사	880	’14.03 ~ 10	나철흠 배상현	통합발주
한강교량 긴급복구 비축자재 정비	150	’14.03 ~ 07
탄천 1고가교 보수 및 포장개량공사	1,000	’14.03 ~ 10		통합발주
탄천 2고가교 보수 및 포장개량공사	1,000

❍ 용 역

점검종류	시 설 명(발주)	예산액 (천원)	사업기간	업무담당	비 고 (낙찰자 결정)
정밀안전진단	- 잠실대교	296,600	‘14.03~08	윤철식	PQ심사
	- 탄천2고가교	602,200	‘14.03~11	나철흠	PQ심사
정 밀 점 검	- 올림픽대교	90,546	‘14.03~07	배상현	적격심사
	- 내곡I.C교 - 개포,일원,수서지하차도	89,204	‘14.03~08	조장호	적격심사
	탄천1고가교, 고덕천교 한남대교 남단2교	108,452	‘14.03~09	나철흠	적격심사
	- 상행 1~4교 하행 1,2,4교	62,821	‘14.03~08	윤철식	적격심사
	암사 지하차도	1,864	‘14.03~05	조장호	외부전문가 초빙 자체점검

세부추진일정

❍ 2014. 01~02  : 현장조사 및 설계(도로시설과 사전 협의)

❍ 2014. 02. 15  : 공사계약심사 의뢰(용역 : 타당성심사 기 완료)

❍ 2014. 03. 05  : 공사(용역)발주

❍ 2014. 03. 20  : 공사(용역)계약 및 착수

Ⅲ		행 정 사 항

예산과목(도시개발특별회계)

❍ 도시안전실 도로시설과(부서)

- 도로시설관리(정책), 도로시설물 안전관리 및 수준향상(성과목표)

자동차전용도로 교량관리(단위), 시설비(세목)

→ 탄천1,2고가 보수, 자동차전용도로 일상유지

- 교량관리(정책), 도로시설물 안전관리 및 수준향상(성과목표)

교량시설물운영(단위), 시설비(세목)

→ 한강교량 긴급복구 비축자재정비, 시설물 안전점검 및 진단

- 교량관리(정책), 도로시설물 안전관리 및 수준향상(성과목표)

한강교량관리(단위), 시설비(세목)

→ 한강교량일상유지보수, 잠실철교(도로교)보수

붙임 : 사업별 위치도 및 세출예산서(도로시설과) 1부.  끝.