문서번호	조경과-1119
결재일자	2016.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장	푸른도시국장
이진범	조윤래	이원영	01/27 최광빈

2016년 지정보호수 유지관리사업 추진계획

2016. 1

푸른도시국

조  경  과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	■	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 지정보호수 유지관리사업 추진계획

지역의 역사성과 상징성을 간직하고 있는 보호수에 대해 외과수술, 병해충방제 등 유지관리를 통해 지속적인 생장을 도모하고, 보호수 주변 정자마당을 조성하여 지역주민의 휴식과 만남의 장소로 제공하고자 함

1		추 진 방 향

전문가의 진단에 의거 체계적인 보호수 유지관리 시행

지속적인 생육이 가능토록 주변 환경 개선

보호수 주변 정자마당 조성으로 지역 커뮤니티 활성화 기여

2		사 업 개 요

현    황 : 종로구 궁정동 55-3번지 회화나무 등 212주

사업기간 : 1999년 ~ 계속

사업내용

‣ 보호수 관리 : 병해충방제, 외과수술, 수형조절 등 생육환경 개선

‣ 정자마당 조성 : 보호수 주변 쉼터조성으로 만남과 휴식의 장소 제공

총사업비 : 14,160백만원(‘15년 이전 8,364, ‘16년 945, ’17년 이후 4,851)

3		2016년 사업계획

사업기간 : 2016. 1 ~ 10월

사업대상 : 24개 자치구 195주

사업내용

‣ 지정보호수 유지관리

- 위치 및 규모 : 종로구 연지동 청운동 89-9번지 등 195주

- 내용 : 외과수술, 수형조절 및 고사지 제거, 영양공급, 병해충 방제 등

‣ 지정보호수 정자마당 조성

- 위치 및 규모 : 구로구 가로봉동 13-175 일대 583㎡

- 내  용 : 건물철거 및 정자마당 조성

소요예산 :945백만원

(단위 : 천원)

예 산 액	지정보호수 유지관리	지정보호수 정자마당 조성	비 고
945,000	487,000	458,000

예산과목

‣ 조경과, 생활주변 녹지확충, 생활주변 녹지확충, 지정보호수 유지관리(마을정자목 쉼터조성), 시설비(401-01)

추진일정

지정보호수 유지관리	지정보호수 정자마당 조성
‣ `16. 1. : 사업비 재배정 ‣ `16. 2. ~ 3. : 설계시행 ‣ `16. 3. ~ 9. : 공사시행 ‣ `16. 10. : 준공보고 ※ 공종별 적기에 유지관리 시행	‣ `16. 1. ~ 2. : 설계 디자인 심의 ‣ `16. 2. ~ 3. : 거주민 이주 등 ‣ `16. 4. : 공사발주 ‣ `16. 5. ~ 6. : 공사시행 ‣ `16. 6. : 공사준공

5		추 진 방 법

지정보호수 유지관리

‣ 수목에 대한 병징, 수세쇠약 원인 등을 전문가 진단·처방으로 시행

‣ 유지관리 공종별(병해충방제, 외과수술, 영양공급, 수형조절 및 고사지 제거 등) 적기에 작업 시행

‣ 공종이 단순하고 소액이므로 사업비 일괄 재배정 하여 자체 설계로 시행하고 설계심의는 생략

‣ 지정보호수가 사유지내 위치하는 경우에는 유지관리 시 소유자와 협의하여 불편함이 없도록 하고, 민원시 보호수 관리에 크게 위해가 되지 않는 범위내에서 적극적으로 처리

(※‘15년 행정사무감사 시의원 건의사항)

지정보호수 정자마당 조성

‣ 도시계획시설(공공공지) 결정 등 관련 절차 적기 이행

‣ 보호수(측백나무)의 적정한 생육공간 확보

‣ 지역주민, 시의원 등 관계자 의견 수렴

‣ 주민 협의체를 구성하여 지속적인 관리방안 모색

‣ 주변현황, 접근성 등에 대한 면밀한 분석으로 완성도 있는 설계 시행(공공 조경가 자문 적극 활용)

6		행 정 사 항

유지관리 사업 착공/준공보고(보호수별 공사내용 첨부) : 5일 이내

보호수 주변 각종 행위에 대한 사전 협의 철저

사유지인 경우 소유자와 협의(민원)내용을 사업에 반영하여 시행

「서울특별시 보호수지정 및 관리에 관한 조례」에 의거 보호수 보호 및 점검, 관리대장 등 기록관리 철저

붙임  1. 2016년 지정보호수 유지관리 대상지 및 사업비 교부액(안) 1부

2. 구로구 정자마당 조성 사업대상지 위치도 및 현황사진 1부

3. 착공/준공보고 서식 1부.  끝.