문서번호	방재시설부-1256
결재일자	2016.1.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	01/27 임춘근
협조
	주무관		손병도

「경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)」

사토장 변경 실정보고 검토

2016. 01

도시기반시설본부

방재시설부

『경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)』

사토장 변경 실정보고 승인요청 검토

「경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)」 와 관련하여 사토장 변경 실정보고에 대한 검토 보고임.

▶ 관련근거 : 선진경춘(감)-16–032(2016.01.22)호

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 노원구 경춘철교 ~ 산업대3길 고가철교

○ 규    모 : 공원조성 연장(L) 1.1km, 면적(A) 53,860㎡

○ 사업기간 : ‘15.10.6 ~ ’16.10.3 (1차수 ‘15.10.6 ~ ’16.8.5)

○ 공 사 비 : 5,445백만원

Ⅱ

실정보고 내용

○ 사토장 현황

- 설  계 : 수도권매립지 (L=53.4km)

○ 사토장 변경 사유

- 공원 공사장 내 토사가 불량하여 수도권 매립지로의 토사 반출이 불가하며 토석     정보시스템을 활용하여 사토장 선정코자 하였으나 반출시기 및 토질 상태가 맞지     않아 토사 반출이 가능한 민간 사토장으로 변경이 필요한 실정임.

○ 사토장 변경 현황

************************************

- 사토장 선정 운반거리 : 40.06km

- 사토장 지목 : 임야

- 소 유 자 : *********

○ 물량검토

구 분	단위	당 초	변 경	비고
1. 토공
잔토처리	㎥	7,602	7,602	운반거리 변경 당초:54.4km →변경:40.06km

○ 단가검토

구 분	단위	당 초	변 경	비고
1. 토공
잔토처리	㎥	15,532/㎥	16,363/㎥	낙찰율 85.496% 적용
적용		○

○ 단가적용

- 사토장 변경에 따른 운반거리가 (53km → 40km)로 변경되나 시공사와 기존

계약단가로 사토처리 하기로 협의

Ⅲ

건설사업관리기술단 의견

○ 『경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)』 사토장 변경 실정보고에 대하여 검토한 결과 경춘선 공원조성 공사현장에서 반출되는 토사 품질이 불량하여 반출이 가능한 사토장으로 변경함은 타당하며,

○ 운반거리 변경으로 공사비가 증가(증11백만원) 되나 시공사가 기존 계약단가로 사토처리하기로 함에 따라 기존 계약단가 반영코자 함.

Ⅳ

보고자 의견

○ 상기 내용을 검토한 결과 사토장 변경 및 단가 적용에 대한 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단되어 차후 설계변경에 반영토록 승인통보코자 함.

붙  임 : 건설사업관리기술단 실정보고서 1부.  끝.