문서번호	119특수구조단-1553
결재일자	2014.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
3팀장		산악구조대장	119특수구조단장
성재욱		장형순	01/23 최응섭
협 조
	담당자			김동오
	팀장			한범희
	담당자			김연우

2014년 산악구조대 예산집행 추진 계획

119특수구조단

【산악구조대】

2014년도 산악구조대 예산집행 추진 계획

효율적이고 체계적인 예산집행을 통하여 신설 운영중인 산악구조대 장비 확보 및 상시출동을 위한 여건 개선으로 24시간 공백 없이 신속한 산악사고 대응체제를 구축하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

소방행정과-35352(2014.12.31.)호「2014년도 세입․세출 예산편성 결과 알림」

119특수구조단-1284(2014.1.20.)호「첨단구조장비 보강을 위한 예산집행 계획」

119특수구조단-1415(2014.1.22.)호「도봉산․관악산구조대 전진기지 설치 기본 계획」

Ⅱ		추진계획

특수구조단 창단 시 발대한 산악구조대(도봉, 북한, 관악산) 장비보강

⇒ 일체형 안전밸트 등 15종 166점 보강

도봉산․관악산 전진초소 확대 설치 ⇒ 컨테이너하우스 확대, 상․하수도, 전기, 통신시설 등 설치

구조장비 유지․관리를 위한 소모품 구매 등 장비 유지보수

Ⅲ		예산현황

총 예산액 : 180,366천원

예산과목 :

예산과목				2014년 예산배정 (천원)	비고
정책	단위	세부	편성목-통계목
특수재난 능력향상
특수구조단 운영
		산악구조대 운영		180,366
			사무관리비	36,820	구조장비 유지․관리를 위한 소모품 구매 등
			시설비	45,600	산악구조대 전진기지 설치
			자산및물품취득비	97,946	산악구조대 신설 운영에 따른 구조장비 확보

Ⅳ		세부계획

산악구조대 신설 운영에 따른 구조장비 확보

단 계		일 정		주 요 내 용
사전조사 및 규격조사 운영		1~2월 중		◦구조장비 선정을 위한 사전조사 ◦물품규격서 작성
⇩
계약 심사 및 계약 의뢰		3월 중		◦재무국 계약심사과 ◦산출가격 적정 및 특정제품 구매 여부 확인
⇩
입찰 공고 및 계약 체결		4월 중		◦소방행정과 계약 체결 - 일반경쟁입찰
⇩
납품 및 검수		5~6월 중		◦물품 납품 및 검수요청 ◦검수전담반 운영 및 검사
⇩
집행잔액 추가 구매		9~11월 중		◦물품규격서 작성 ◦계약 체결 – 전자공개 수의계약 ◦물품 납품 및 검사(수)

산악구조대 전진기지 설치

단 계		일 정		주 요 내 용
사전조사 및 규격조사 운영		1~2월 중		◦전기, 통신, 상․하수도시설 등 사전조사 ◦규격서 및 과업지시서 작성
⇩
위치확정 및 세부설치계획		3월 중		◦적합부지 선정 ◦관계기관(단체) 협의 허가 등
⇩
입찰 공고 및 계약 체결		4월 중		◦소방행정과 계약 체결 – 전자공개 수의계약
⇩
납품 및 검수		6월 중		◦물품 납품 및 검수요청 ◦검수전담반 운영 및 검사

구조장비 유지․관리를 위한 소모품 구매 등

단 계		일 정		주 요 내 용
사전조사 및 규격조사 운영		1~2월 중		◦구조장비 선정을 위한 사전조사 ◦물품규격서 작성
⇩
입찰 공고 및 계약 체결		4월 중		◦소방행정과 계약 체결 – 전자공개 수의계약
⇩
납품 및 검수		5~6월 중		◦물품 납품 및 검수요청 ◦검수전담반 운영 및 검사

Ⅴ		행정사항

상기 사업추진 담당자 및 각 산별 구조장비 담당자는 본 계획을 숙지하여 예산집행에 차질이 없도록 추진하기 바라며,

구조장비 확보에 따른 『규격조사반 운영』 및 『응급처치용 의약품 및 소모성기자재 구매』는 별도 계획 수립하고,

집행잔액 발생 시 예산 항목에 맞는 적정 장비 추가 구매.