문서번호	총무과-1329
결재일자	2016.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	총무부장
강상천		박병현	01/27 이상국
협 조
	기획예산과장			김건태
	주무관			심옥경
	주무관			임봉순

외부계단 · 데크 긴급 보수 계획

- 난지 안내센터 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
				17백만원

2016. 01

한강사업본부

총 무 과

난지 안내센터 외부계단 · 데크 긴급 보수 계획

난지 안내센터 외부계단 및 보행데크의 철재가 노후, 부식되어   안전 발생 위험이 있어 노후, 부식구간 철재를 긴급 보수 · 보강하여 안전사고 발생 위험을 사전에 방비 하고자 함

■ 점검기간 : ‘16. 1. 18 ~ ‘16. 2. 29

■ 보수대상

❍ 외부계단(좌측) 및 데크(샤워실, 식당, 자원봉사자실)

- 데크목 철거 및 재 설치(재활용)

- 계단 및 데크 철재 : 교체 및 보수 · 보강

■ 소요예산 : 17,160천원(부가가치세 포함)

❍ 예산과목 : 한강사업본부 청사시설개선 및 유지관리, 시설비

■ 추진방법 : 수의계약

■ 추진계획

❍ 2016. 1.18 ~ 1.22 : 현장조사 및 보수방법 검토

❍ 2016. 1.25 ~ 1.29 : 보수방침

❍ 2016. 2. 1 ~ 2. 5 : 공사 발주 및 계약

❍ 2016. 2.11 ~ 2.26 : 공사 추진 및 완료

❍ 2016. 2.29 : 공사 준공(예정)

별첨 : 내역서