문서번호	시설보수과-615
결재일자	2016.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
조장호		장형상	01/28 임대성
협 조
	주무관			나철흠
	주무관			김종범
	주무관			정병윤
	주무관			한상신

2016년 도로시설물 안전점검 추진계획

동부도로사업소

(시설보수과)

2016년 도로시설물 안전점검 추진계획

우리사업소에서 유지관리하고 있는 교량,터널,지하차도 등 각종

도로시설물에 대한「2016년 안전점검 추진계획」을 수립하여

체계적인 안전점검으로 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		점검대상 및 기준

점검대상                                           (단위:개소)

구분	계	일반교량	고가차도	지하차도	복개구조물	터널	비고
계	42	24	1	13	1	3
1 종	4	-	-	장지	-	매봉,일원 위례
2 종	17	삼성교,탄천2교,탄천교,광평교 대곡교,대치교,성내교 영동2.3.5교,강일육교(11개)		대치,석촌, 천호,청계산 신원	성내유수지교	-
법정 외	21	장지1.2교,복정2교,세곡1.3교 헌릉교,오륜교,성내5교,서부교 잠실호수교,상일2교,고덕교 여의천교(13개)	방이고가	가락,송파,위례1, 위례지하보차도 내곡,신원 BOX 탄천우안도로	-	-

※ 미 인수시설(장지,위례1,탄천우안지하차도)은 인수후 점검시행

점검기준

❍ 추진근거

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 제7조 ⇒ (1종, 2종 시설물)

- 재난 및 안전관리기본법 제27조(특정관리대상시설등의 관리 등) ⇒ 법정 외

- 서울특별시 도로등 주요시설물 관리에 관한 조례 제12조 ⇒ 법정 외

※ 법정 외 시설물은 2종 시설물에 준하여 안전점검 시행

- 2015년도 도로시설물 자체 안전점검 추진계획(도로시설과-968호,15.1.23)

❍ 종별 점검기준

구 분	정기점검	정밀점검	정밀안전진단	비고
대상시설	1∙2종, (법정 외)	1∙2종, (법정 외)	1종 시설물 (완공후 10년경과 시설물)	긴급점검은 필요시
실시시기	반기에 1회 이상	A 등급 : 3년 1회 이상	A 등급 : 6년 1회 이상
		B.C등급 : 2년 1회 이상	B.C등급 : 5년 1회 이상
		D.E등급 : 1년 1회 이상	D.E등급 : 4년 1회 이상
			※안전점검결과 관리주체가 안전성확보를 위해 필요시
점검수준	전반적인 외관형태 관찰	- 면밀한 외관조사, 측정 및 시험실시 - 시설물 상태평가	- 정밀한 외관조사, 측정 및 시험 - 시설물상태 및 안전성평가
점검방법	자체점검	- 안전진단 전문기관 - 시설물유지관리업자 - 외부전문가 합동점검	- 한국시설안전공단 (특수교량,1천미터이상터널) 안전진단전문기관

Ⅱ		안전점검 추진계획

점검방향

❍ 계획적이고 예방적인 도로시설물 안전점검 시행

❍ 일상순찰 강화로 시민불편사항 즉시 발견과 빠른 조치로 시민편의 제공

점검대상 : 삼성교 외 41개 시설

점검기간 : 2016. 1 ~ 12. 31

점 검 자

❍ 시설보수과장외 6명(3인 1조) - 일일,정기점검

❍  안전점검 전문기관 및 외부전문가(시설안전자문단) - 정밀점검,진단,                                                                  해빙기,동절기

점검종별 세부점검계획

❍ 일일점검

- 점검시기 : 매주 2회 순찰(1,2,7,8월은 주 1회 순찰)

- 점 검 자 : 시설보수과장외 6명(3인 1조 편성)

- 점검수준 : 순찰점검

- 점검방법

∙ 교면포장, 베수상태 및 방호호울타리 등 시민불편사항 위주 순찰점검

∙ 『일일점검 일정 계획표』에 따라 시설물별 점검실시

❍ 정기점검

- 점검시기 : 반기 1회 이상

- 점 검 자 : 시설보수과장외 6명(2인 1조 편성)

- 점검수준 : 전반적인 외관형태 관찰

- 점검방법

∙ 상위점검(정밀점검)을 실시할 경우 상위점검으로 대체(1회)

∙ 『계절별 취약점검』과 중복될 경우 병행 실시

∙ 상위점검시 지적된 주요손상을 중심으로 점검실시

∙ 점검중 구조적 손상부는 전문가 합동점검 또는 긴급점검 실시

❍ 정밀점검 및 정밀안전진단

- 점검시기 : 2016. 4.10 ~ 11. 30

- 점 검 자 : 안전점검전문기관 및 자체(외부전문가) 정밀점검

- 점검수준 : 장비에 의한 측정 및 시험, 시설물상태 및 안정성평가

- 점검대상 : 광평교외 18개소(전문기관) / 여의천교외 4개소 자체정밀점검

❍ 기타 안전점검

- 점검종류 : 설날, 해빙기, 우기, 추석절, 동절기, 시민대표

- 점검시기 및 점검자

구 분	점검일정	점검자		비고
		자문위원	자체
설 날	1월~2월		○
해빙기	2월~3월	◉	○
우 기	5월		○
추석절	8월~9월		○
동절기	11월~12월	◉	○
시민과함께	10월		○	시의원,시민

- 점검수준 : 전반적인 외관형태 관찰 및 시민불편 사항 등

- 점검대상 : 삼성교 외 41개 시설물

Ⅲ		행정사항

점검결과 조치

❍ 경미한 사항은 현장 시정조치 또는 『일상유지보수업체』 작업지시

❍ 보수 예산수반 및 구조적 사항은 별도 보수.보강계획 수립

❍ 긴급사항은 사업소장 및 도로시설과,교량안전과 즉시 보고

❍ 안전점검 결과 미 조치사항에 대하여 조치완료시 까지 추적관리

자문수당 지급

구 분		점 검 수 당	비 고
현장점검	전 문 가	20만원/인.회	15년 엔지니어링 기술자 노임단가 기준
	시․구의원, 시민	10만원/인.회	-15년도 서울시 예산편성잠정기준의 위원회 참석수당 지급기준에 준해서 점검수당지급-기본 10만원, 초과 5만원(2시간 이상시)
자 문	전 문 가	10만원/인.회 (2시간 이상시)

예산과목

안전총괄전본부 도로시설과(부서), 도로시설관리(정책), 도로시설물운영(단위),

도로시설물안전자문단운영, 사무관리비

붙임 : 1) 시설물 일일점검계획 1부.

2) 일일점검 결과보고서(양식1)

3) 반기별 점검결과 보고서(양식 2).  끝.