투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	센트럴장교(주) 대표이사 귀중
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자 부담공사 준공기한 연장 승인 통보(중구 을지로2가 장교구역 4지구 주변)

1. 센트럴장교 15-P1231-1(2015.12.31)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 요청한 교통안전시설물 원인자 부담공사 준공연기 신청에 대하여 아래와 같이 기간연장 승인하오니 공사시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 교통안전시설물(신호,표지) 원인자 부담공사

나. 공사장소 : 중구 을지로2가 장교구역 4지구 주변 교통안전시설물 설치공사

다. 원 인 자 : 센트럴장교㈜

라. 공사기간연장 승인내역

- 당 초 : 2014.9.15 ~ 2015.12.31

- 변 경 : 2014.9.15 ~ 2016.1.31

(교통안전시설정보(TGIS)에 시설물정보 입력후 준공 요청)

마. 변경사유 : 동절기 공사시행으로 인한 품질저하 및 부실공사 예방에 따른 준공기한 연장. 끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	장병준		기전과장	01/28 양영민
협조자
시행	기전과-1065	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203(상암동 835)	/	http://seoul.go.kr
전화		/전송	02-300-8410	/		/	대시민공개