문서번호	급수운영과-2254
결재일자	2016.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		서부수도사업소장
전성호	김홍준	박길영		01/28 강홍기
협 조
	시설관리과장		유인행
	시설관리팀장		이준호
	주무관		신동철

2016년 송배수관 정비사업 추진계획

2016. 01.

서부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 송∙배수관 정비사업 추진계획

2016년 우리사업소 송∙배수관 정비사업의 원활한 추진을 위하여 사업현황 및 공사설계 시 유의사항 등 추진계획을 보고함.

관련근거

배수과-9454(‘15.12.31) : ’16년도 노후 송배수관정비 추진계획

누수방지과-10060(‘15.11.26) : ’16년도  노후 배급수관 정비공사 추진계획

정비사업 현황

대상사업

연번	공 사 명	공사개요			사업선정 사유	업무 담당자
		구 경 (㎜)	연 장 (m)	소요예산 (백만원)
송배수관 : 1건		600	700	1,400
1	공덕로타리~한계례신문 앞 간 송배수관 정비공사	600	700	1,400	노후관정비	시설6급 김승완
배급수관 : 3건		80~350	5,890	4,600
1	창천동 502-10 ~ 연희동353-102번지외 7개소 배급수관정비공사	80~350	2,000	1,550	비내식성관 정비	시설7급 양재덕
2	망원동 416-1번지외 7개소 배급수관정비공사	100~300	1,710	1,300	비내식성관 정비	시설8급 김병주
3	갈현동 398-7외 9개소 배급수관정비공사	80~300	2,180	1,750	비내식성관 정비	시설7급 김기문

공사설계 시 유의사항

현장조사 시점부터 시설관리공단 위탁감독자를 참여시켜 설계방향을 이해하고 현장 감독 업무를 수행할 수 있도록 조치

건설공사 원가계산 개선 사항 반영
(재무회계과-1417, ‘15.2.05. “건설공사 원가산출 개선품셈 통보)

간선도로에서 공사가 시행되는 점을 감안하여 현장 안전관리(교통유도 시설 및 안전원 등)와 관련된 항목이 누락되지 않도록 반영

단수 수반 시 단수를 최소화 할 수 있도록 일시급수시설 설치 및 제수밸브 조절비 반영

공사 설계 및 시공은 “배급수관 정비사업 지침”에 의거 실시

(누수방지과-3482, ‘13.5.22. “배급수관 정비사업 지침 개정(안) 통보”)

건설공사 원가산출시 주택가 할증 기준 적용(계약심사과-14187)

- 기계장비로 시공하는 모든 공종, 터파기(인력)가 수반되는 공종

향후 추진계획

- 2016. 02. 01. ~ 02. 27.  :  공사설계 및 심사의뢰

- 2016. 03. 02. ~ 11. 30.  :  공사계약 및 시행

행정사항

심사결과에 따라 사업발주.  끝.