문서번호	방재시설부-1385
결재일자	2016.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설부장
김상용		조성만	01/28 임춘근
협조	환경설비과장		여인웅
	경리과장		최정수

『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 전면책임감리용역(7차)』

설계변경(7차2회) 검토 보고

2016. 1.

도시기반시설본부

(방재시설부)

『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 전면책임감리용역(7차)』

설계변경(7차2회) 검토 보고

우리본부에서 시행중인「서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 전면책임감리용역(7차)」에 대한 설계변경(7차2회) 검토보고 임.

사업개요

❍ 용 역 명 : 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 전면채임감리용역(7차)

❍ 위    치 : 서울시 강서구 양천로 201(마곡동, 서남물재생센터내)

❍ 사업개요 : 고도처리시설개량 127만톤/일, 시설현대화 36만톤/일

❍ 용역기간 : 2015. 05. 04 ∼ 2016. 08. 17

❍ 시 공 사 : ㈜도화엔지니어링외 1개사

❍ 도 급 비 : 1,213,100천원

보고내용

<7차2회 변경>

❍ 관련근거 : 방재시설부-17865호(‘15.12.31)『마곡재생수 공사일시정지 및 정지기간 현장 관리방안 제출요청』

❍ 변경사유 : “마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사”의 기계ㆍ전기공사 완료후 종합시험운전 시작전까지 공사일시정지(기계:`15.12.31, 전기:`16.01.31)에 따른 감리투입기간 조정.

❍ 변경내역

구 분		당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
7차 2회	계	1,213,100천원 (`15.05.04∼`16.08.17)	1,087,700천원 (`15.05.04∼`16.02.05)	감125,400천원 (감193일)	투입기간 조정
	서남	858,400천원 (`15.05.04∼`16.01.30)	881,700천원 (`15.05.04∼`16.02.05)	증23,300천원 (증6일)
	마곡	354,700천원 (`15.05.04∼`16.08.17)	206,000천원 (`15.05.04∼`16.02.05)	감148,700천원 (감193)

조치의견

<서남>

❍ 서남감리원 투입기간을 마곡재생수공사 감리용역과 동일하게 연장(증 6일) 조정하여 7차감리용역 준공

<마곡>

❍ 마곡재생수 공급시설 설치공사 완료후 종합시험운전 시작전까지 공사일시정지에 따라 감리원 투입기간 조정(감193일)

※ 감액으로 인한 잔여금액은 시운전을 포함한 8차 감리용역으로 발주.

<종합>

❍ 본 감리용역은 서남ㆍ마곡 통합감리로서 종료시점이 다른 7차 감리용역에 대하여 감리기간을 서로 동일하게(2016.02.05) 조정하여 준공 코져함.

붙임 : 1) 책임감리원 검토의견서 1부.

2) 설계변경(7차2회) 내역서 각 1부. 끝.