문서번호	방재시설부-1445
결재일자	2016.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
박중모		代박중모	01/29 임춘근
협조

- 합정외 1개소 빗물펌프장 증설공사 -

실정보고(지하철 안정성 검토용역 시행) 승인요청 검토보고

2016. 01

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 합정외 1개소 빗물펌프장 증설공사 -

지하철 안정성 검토용역 시행 실정보고 승인요청 검토

「합정외 1개소 빗물펌프장 증설공사」와 관련하여 “지하철 안정성 검토용역 시행”  실정보고 승인요청에 대한 검토 보고임.

【 관련근거 : 서울시설공단 공사감독1처-516(2016.01.27.)호】

□ 공사개요

□ 공 사 명 : 합정외 1개소 빗물펌프장 증설공사

□ 공사위치 : 마포구 합정동 196-4, 성산동 99-5 일원

□ 공사규모 : 빗물펌프장 증설 2개소(합정, 중동)

□ 공사기간 : 2013. 1. 4 ~ 2016. 4. 30

□ 도 급 비 : 5,297,369천원

□ 시공사/감리사 : (주)금강주택 / 서울시설관리공단

□ 실정보고내용

□ 합정빗물펌프장 증설 공사구간이 지하철 2호선 구조물과 약 17m근접 거리에 위치하고 있어, 철도안전법 제45조(철도보호지구안에서의 행위제한)에 따라

□ 서울메트로와 협의결과 지하철 안정성 검토서 보완 요청이 있어 전문 기관에 의뢰 검토용역 시행이 필요한 실정임.

□ 용역현황

- 용 역 사 : 한국구조물 안전연구원

- 용 역 비 : 16,937,800원

- 용역내용 : 합정빗물펌프장 굴착에 따른 인접고가철도의 영향성검토

□ 감리자 의견(시설관리공단)

□ 용역 시행 적정성, 용역업체 자격 · 용역 책임기술자 자격 · 용역금액  적정여부 검토결과 “적정” 하여, 위 사항에 대하여 우선 시행하고 향후  3차분 설계 변경시 반영

□ 보고자 의견

□ 상기 내용을 검토한 결과 지하철 안정성 검토용역 시행에 대한 감리자 검토의견이 타당하다고 판단되어 승인 통보하고, 차후 설계 변경시 반영토록 조치하고자 함.

붙 임 : 1. 서울메트로 보완요구 문서 1부.

2. 공단 실정보고 1부.  끝.