서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	사가정-암사 광역도로 총사업비(기간연장) 조정 요청

1. 우리 시 행정에 적극 협조하여 주시는 귀 부에 감사드리며, 우리시에서 시행중인 「사가정-암사 광역도로사업」과 관련입니다.

2. 「사가정-암사 광역도로사업」은 지난 ’14.11월 전 구간 개통 완료하고 현재 공용 중에 있으나 군경 합동검문소 설치 및 대체녹지 조성 관련 인·허가사항 이행 등을 위하여 추가 사업기간이 필요하여 아래와 같이 총사업비(기간연장) 조정 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사업기간 변경 요구내역

구분	현행	변경	변경사유
기간연장	2001∼2015년	2001∼2016년	- 경기도 구리시 구간 ‘군경합동검문소’ (아천IC) 신축 허가 지연 및 대체 녹지구간 확정 지연으로 인한 절대 공기 부족

붙임 : 1. 연이월 요청서 1부.

2. 총사업비 조정요구서 1부.   끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	국토교통부장관(간선도로과장),국토교통부장관(투자심사담당관)
주무관	김대희		광역도로계획팀장	최연호		도로계획과장	01/29 하종현
협조자
시행	도로계획과-1539	(		)	접수		(		)
우	04524		/
전화	02-2133-8087	/전송	02-2133-0763	/	kdhlife@seoul.go.kr	/	대시민공개