문서번호	도시철도토목부-1237
결재일자	2016.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
안태현		김성호	01/29 김진팔
협 조
	주무관			정삼기
	주무관			이경훈
	주무관			엄상민

『하남선(5호선연장) 건설공사』

1-1공구 사전공사 추진계획 검토 보고

2016. 1

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「하남선(5호선연장) 건설공사」

1-1공구 사전공사 추진계획 검토 보고

하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사와 관련하여 사전공사 추진계획에 대한 책임건설사업관리단 ㈜동일기술공사로부터 실정보고가 있어 이에 대한 검토임.

※ 관련근거 : 하남 제16-010(2016.01.08.)호와 관련임.

Ⅰ		사 업 개 요

○ 위  치 : 서울시 강동구 상일동역~서울외곽순환고속도로~동광교회 앞

○ 공사명 : 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사

○ 규  모 : 628.5m, 정거장 : 1개소, 교량 : 1개소

- 본  선 : 460.5m(개착 293.6m, 교량 55m, 터널 112.9m)

- 정거장 : 1개소, 168m(H1 정거장)

- 부대시설 : 환기구 2개소

- 입출고선 : 16.9m

○ 사업기간 : 2015.03.30. ~ 2019.03.28.

○ 시공사 : 한신공영㈜, ㈜한라

○ 감리사 : ㈜동일기술공사 외 5개사

Ⅱ		현 황

○ 계약금액(전체)  : 68,082,000,000원

○ 공사기간(전체)  : 2015.03.30~2019.03.28

○ 1차공사(2015년) : 2015.03.30~2015.12.31

○ 2차공사(2016년) : 발주 추진중(현재 미계약)

Ⅲ		사전공사 내용

위 치	공사내용	비 고
본선1구간	- 시점부 하수강관 이설
정거장	- 가시설 및 차수그라우팅(좌측부) - 복공판 설치
환기구#2	- 가시설 및 차수그라우팅(좌측부) - 복공판 설치
지장물이설	- 가로등 이설

Ⅳ		사전공사 사유

○ 2015년 1차분 공사가 준공(‘15.12.31.)됨에 따라 공사의 연속성을 확보하여야 하나 2차공사 발주 및 조달 계약 기간 소요로 인해 부득이 정거장, 본선, 환기구 및 지장물 이설 등 현장 안전과 효율적 공사추진을 위해 2차공사 계약시 까지 선공사 시행이 필요한 실정임.

Ⅳ		감리 검토의견

○ 지하철공사는 공사의 안전성, 효율적 인력 및 자재, 장비와 현장관리 측면(전력사용, 양수, 계측 등)에서 단절되지 않고 연속성 유지가 필요함.

○ 시공사 의견과 같이 향후 발주분인 2차공사 공종중 전체 공정에        부합되도록 승인함이 타당할 것으로 사료됨.

Ⅴ		조 치 의 견

○ 본선1구간, 환기구#2, 정거장 및 지장물 이설 공사 구간에 대해 책임감리원 검토 의견과 같이 원활한 공정관리를 위해 사전공사를  승인코자하며,

○ 공사 추진에 따른 시공, 품질 및 안전관리 계획을 수립 시행에  만전을 기하도록 하고, 상기 선시공 공종에 대해서는 2차공사에 반영토록 조치코자함.

붙임 : 관련공문 및 감리검토의견서 1부.  끝.