내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	계약심사과장
(경유)
제목	계약심사 결과에 따른 사업물량 추가시행 협의(수정)

1. 계약심사과-1815(′15.02.03)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 우리부서에서 추진할 2015년 하수도 GIS DB 정확도 개선 물량을 조정, 불용되는 예산의 최소화 등 확보된 예산을 효율적으로 집행하기 위하여 계약심사 시 조정된 내용을 반영하여 아래와 같이 물량을 추가하여 발주하고자 협의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 2015년 하수도관리전산시스템 유지보수·기능고도화 및 GIS DB정확도 개선

나. 심사결과

심사 내용			발주 협의
요청금액	조정금액	증감액	요청금액
1,984,172,000원	1,883,543,000원	-100,629,000원	1,984,098,000원

다. 발주 협의

정확도 개선 항목	단위	당초 (심사물량)	변경 (발주물량)	비고
기준점측량	점	650	694	44점 증
관거현황조사편집(맨홀조사)	㎞	300	319	19km 증
사각형로 위치측량(X, Y, Z)	㎞	245.4	260.0	14.6km 증
원형관로 위치측량(X, Y, Z)	㎞	78.6	83.0	4.4km 증
정위치편집	㎞	324	343	19km 증
구조화편집	㎞	324	343	19km 증

※ 제경비·기술료 요율을 기존 검토·회신결과값으로 정상수정 송부

붙임 : 설계내역서 1부.  끝.

	물재생계획과장
주무관	조순연		하수정보팀장	이승원		물재생계획과장	02/05 최진석
협조자
시행	물재생계획과-1622	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	02-2133-3814	/전송		/		/	대시민공개