급수공사 공사기한 연기 보고

주무관		시설관리과장				결재
구본천		02/01 우종근
협 조
	주무관				권승계

2015년 영등포구 관내 상수도공사 감독업무 수행 중 아래와 같이 공사기한 연기 변경사유가 발생하여 보고합니다.

2016.  02.   .

직 지방시설주사보 성명: 구본천

1. 공사기한 연기 및 작업지시 변경 대상

연번	위치	수요가	공사기간	작업지시번호	공사 개요	시공업체
1	**********	***	‘16.01.26 ~ ’16.02.04	신설-186	30mm * 3m	********

2. 공사기한 연기 및 작업지시 변경 사유

- 현장 자재적치로 인하여 수요가 원에 의거 공사기한 연기

[공사 연기원 접수 : 첨부 참조]

3. 처리의견

상기 공사에 대하여 아래와 같이 공사기한 변경하여 급수공사에 만전을 기하고자 합니다.

연번	위치	당초 공사기간	변경 공사기간	비 고
1	**********	‘16.01.26 ~ ’16.02.04	‘16.01.26 ~ ’16.02.29	작업시기 미도래

첨부 : 공사연기원 1부.  끝.