투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	서울인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 통신공사 계약변경의뢰(총차, 1차)

1. 설비부-1483(2016.01.29.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 「서울 인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링  통신공사」에 대하여 아래와 같이 계약변경 요청하니 조치하여 주시길 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울인생이모작지원센터 50+캠퍼스 전환 리모델링 통신공사

나. 계약금액 : 총차 88,541,030원(1차 9,000,000원)

다. 공사기간 : 총차‘15.11.01.~‘16.03.31.(‘15.11.01.~‘16.02.29.)

라. 계 약 자 : **************

마. 계약변경 내용

(단위 : 원)

구 분	계약금액		증·감	비고
	당초	변경
총 차	88,541,030	96,646,000	증 8,104,970	공사기간 변경없음
1 차	9,000,000	8,665,855	감 334,145

바. 예산과목 : 복지본부어르신복지과, 어르신복지수준향상 및 장사시설운영내실화, 치매어르신지원강화, 어르신복지시설 설치 지원, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서(총차, 1차) 각 1부.

3. 합의서 1부. 끝.

	설비부장
주무관	지장환		환경설비과장	여인웅		설비부장	02/01 권오식
협조자	경리과장	최정수
시행	설비부-1590	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8611	/전송	02-3708-8659	/	amanhope@seoul.go.kr	/	부분공개(6)