문서번호	급수운영과-1869
결재일자	2016.2.1.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김종수	김용현	02/01 전명수
협 조

준공기한 연기 보고(오금동 118-20, 신설 240)

명에 의거 2015년 마천1동외 13개동 상수도공사 담당업무 수행 중 아래와 같은 사유가 발생하여 급수공사 준공기한을 연기하고자 보고합니다.

1. 보고 내용 : 급수공사 준공기한 연기

2. 공사 현황

지시번호	공사위치	공사개요	기존공사기간	변경공사기간	연기사유
신설-240	오금동118-20	D30㎜,L=3m	‘16.1.22.~’16.2.1	‘16.1.22.~’16.2.29	신축공사 지연

3. 연기사유 및 기간

- 연기사유 : 신축현장 공사지연으로 인한 수요가 공사시기 조정요청에 따른 작업기간 연기

4. 지체상금 부과여부 : 미부과

5. 조치내용

상기와 같은 사유로 급수공사일정 연기를 요청함에 따라 변경된 공사 기간을 신왕건설 ㈜에 통보코자 합니다.  끝.