투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	성동구청장(토목과장)
(경유)
제목	도로점용허가 기간연장 신청

1. 귀 구의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리본부에서 추진중인 “응봉교 확장 및 성능개선공사” 및 “용비교 ~행당중간 도로개설공사”와 관련하여 도로점용허가 기간연장 신청서를 붙임과 같이 제출하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 도로점용허가 기간연장 사항

연번	공 사 명	점용장소	점용기간		변경사유
			당 초	변 경
1	응봉교 확장 및 성능개선공사	성동구 응봉동 대림아파트 앞 ~ 성수1가 삼표레미콘 앞	'09.07.20.~ '15.12.31.	'09.07.20.~ '16.06.30	공사기간 연장
2	용비교~행당중간 도로개설공사	성동구 금호4동 용비교서측 ~ 성수동 용비교 동측	'11.06.01.~ '15.12.31.	'11.06.01.~ '16.05.31	공사기간 연장

붙임 :  도로점용허가 기간연장 신청서 각 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이정원		터널건설과장	02/01 권혁대
협조자
시행	토목부-2118	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2567	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개