함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(2015년 천호1동외 17개동 상수도공사)

우리사업소에서 시행하고 있는 『2015년 천호1동외 17개동 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여 물량 증․감에 따른 계약금액 변경에 따라 상수도사업본부(재무회계과) 설계심사를 완료하고, 아래와 같이 3차(최종) 변경계약의뢰 합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 천호1동외 17개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 도 급 자 : ㈜태두 대표 서순배

다. 공사기간 : 2015.06.26. ~ 2016.06.30.

라. 변경사유 : 물량 증․감에 따른 계약금액 변경

마. 설계변경 금액 내역

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
총 부기금액	591,494,000원	648,978,000원	증) 57,484,000원
1차수 금액	506,528,000원	506,528,000원	-
2차수 금액	84,966,000원	142,450,000원	증) 57,484,000원

바. 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 급수공사비, 신설공사비

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비[노후상수도관(배급수관)정비]

- 소방용수시설보수,시설비및부대비,시설비(소화용수시설 설치)

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(지원사업성시설비32204)

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 상하수도관교체비(교체장애)

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(소블록 배급수관망)

붙임 : 1. 설계변경 방침서, 내역서, 계약금액 검토결과통보서 및 검토결과서 각 1부.

2. 합의서 및 계약금액조정검증 각 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	양봉우		주무관	송종범		시설관리과장	02/01 代송종범
협조자
시행	시설관리과-2279	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동 541-4)	/
전화	3146-5198	/전송	3146-5239	/	ybw13@seoul.go.kr	/	부분공개(7)