문서번호	어르신복지과-1844
결재일자	2016.2.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		어르신시설팀장	어르신복지과장
서세환		손수달	02/01 박기용
협조

『서남권 돌봄종사자종합지원센터 개보수공사(전기)』

준공정산 설계변경 보고(1차 계약변경)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 1.

어르신복지과

『 서남권 돌봄종사자종합지원센터 개보수공사(전기)』

준공정산 설계변경 보고(1차 계약변경)

서남권 돌봄종사자종합지원센터 개보수공사(전기)와 관련하여 준공에 따른 4대보험료 등을 정산코자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서남권 어르신돌봄종사자종합지원센터 개보수공사(전기)

○ 공사위치 : 구로구 구로동 98-5(구, 영등포수도사업소 청사)

○ 공사규모 : 213.88㎡(지하층 97.3㎡, 4층 116.58㎡)

○ 계약업체 : ㈜럭스 대표 백창현

○ 계약기간 : ‘15.12.18 ~ ’16.1.20

○ 계약금액 : 금12,090,000원

□ 변경내용

○ 변경사유

- 본 공사는 서남권 어르신돌봄종사자종합지원센터 설치를 위한 개보수공사로써, 4대 보험료 등에 대하여 정산하고자 함.

○ 정산금액 : 11,866,440(감 223,560원)

구 분		금 액(원)			비 고
		당 초	변 경	증감액
총공사비		12,090,000	11,866,440	-223,560
도급비	공급가액	10,990,910	10,787,673	-203,237
	부가가치세	1,099,090	1,078,767	-20,323
	계	12,090,000	11,866,440	-223,560

□ 내역서, 국민건강보험료 등 제경비 정산

구 분		금 액(원)			비 고
		당 초	변 경	증감액
내역	전기공사	10,077,440	10,077,440	-0
경비	산재보험료	180,213	180,213	0
	고용보험료	90,009	90,009	0
	건강보험료	76,058	0	-76,058
	연금보험료	111,403	0	-111,403
	산업안전보건관리비	354,323	354,323	0
	노인장기요양보험	4,982	0	-4,982
	소계	816,987	624,545	-192,442
기타	이윤, 부가세 등	1,195,573	1,164,455	-31,118
	계	12,090,000	11,866,440	-223,560

□ 보고자 의견

○ 상기와 같이 당초 계약 내역변경과 4대 보험료를 정산코자 하며,

○ 계약 변경 후 공사준공을 시행하여 청사 유지관리업무에 만전을 기하고자 함

붙임 : 1. 합의각서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 보험료 증빙자료 1부.  끝.