문서번호	주차계획과-1494
결재일자	2016.2.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		주차계획팀장		주차계획과장
이겨라		이미경		02/01 윤보영
협 조

서울역 관광버스 주차장 조성 공사 계획

2016. 1

도시교통본부

(주차계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	코레일
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

서울역 관광버스 주차장 조성 공사 계획

서울역 관광버스 전용 주차장을 조성하기 위한 공사 발주 계획을 수립하여 관광버스 전용 주차구획선 설치 등의 공사를 조속히 시행하고자 함.

� 관련근거

○ 서울역 관광버스 주차장 조성·운영계획(주차계획과-17333, ’15.12.31)

� 공사개요

○ 공 사 명 : 서울역 관광버스 주차장 조성 공사

○ 대 상 지 : 서울역 서부주차장(중구 봉래동2가 122-15외 1필지)

○ 공사내용 : 복토, 펜스·카스토퍼·주차구획선 설치 등

○ 공사기간 : 계약일로부터 20일

� 공사세부내용

○ 주차장 부지 확장을 위한 복토 및 옹벽 설치

- 기존 진출입로가 넓어 경사로 포함 일부를 복토하여 주차장 부지 확장

○ 기존 승용차 주차장을 관광버스 전용 주차장(35면)으로 재설계

- 관광버스 전용 주차구획선 재설치(제거 및 도색), 카스토퍼 설치

[주차장 부지 확장을 위한 복토 및 옹벽 설치]	[관광버스 전용 주차구획 등 설치]

○ 코레일측 승용차 주차장에 별도의 진출입구 마련을 위한 일부 보도 축소

- 기존 관제시설을 이전 설치하면서 승용차 진출입로 폭원 확보

○ 관광버스 전용 주차장과 코레일측 주차장 경계 펜스 설치

- 관광버스 전용 주차장에 승용차 진입 방지

� 발주방식

○ 계약방식 : 전자공개 수의계약(2인 견적)

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 제1항 제5호, 제30조 제1항 제1호

제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제9조제1항 단서에 따른 수의계약에 의할 수 있다.

5. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 계약

가. 「건설산업기본법」에 따른 건설공사(같은 법에 따른 전문공사는 제외한다)로서 추정가격이 2억원 이하인 공사, 같은 법에 따른 전문공사로서 추정가격이 1억원 이하인 공사 및 그 밖의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 8천만원 이하인 공사에 대한 계약

제30조(수의계약대상자의 선정절차 등) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 수의계약을 체결하려는 경우에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있다.

1. 제25조제1항 각 호(제5호는 제외한다), 제26조제1항 및 제27조에 따른 계약의 경우

○ 참가자격

- 건설산업기본법에 의한 “시설물유지보수업” 면허를 소지한 업체(서울시 소재)

○ 공고기간 : 3일

� 공사 소요예산

○ 소요예산 : 48백만원(부가세 포함)

○ 예산과목

- 주차장 건설 및 운영관리, 도심관광버스 주차장 설치, 시설비

� 추진 일정

○ 계약의뢰 : ’16.2.

○ 계약체결 및 공사 : ’16.2.11 ~ 2.29.