문서번호	자연생태과-2229
결재일자	2016.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	생태복원팀장	자연생태과장	푸른도시국장
이정수	박경옥	최현실	02/02 최광빈

2016년 중랑천 녹색브랜드화 사업 추진계획

2016. 1.

푸른도시국

(자연생태과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 중랑천 녹색브랜드화 사업 추진계획

도심속 주요 생태축인 중랑천 명소화를 위해 구역별 특성에 맞게

녹음터널, 자생식물 단지, 초화원 등으로 조성하여 동부권역 균형발전에

기여함은 물론 시민들이 즐겨찾는 관광명소로 제공

Ⅰ		추진근거

중랑천변 그늘 제공 활엽수 식재 검토 시장 요청(’13.4.15)

중랑천 특화‧브랜드화 추진계획 시장보고(’13.6.26)

중랑천 녹색브랜드화 추진계획 수립(’13.7.18 시장방침)

중랑천 녹색브랜드화 기본계획 수립(’14.4.7)

Ⅱ		사업개요

추진기간 : 2013 ~ 2016년(4년간 연차적 추진)

사업규모 : 중랑천 19.3㎞(의정부 시계 ~ 한강 합류점)

사업내용 : 제방 산책길, 둔치 체육시설 및 자전거길 주변 녹음수 식재, 자생 초화원, 쉼터 조성 등

총사업비 : 8,665백만원

추진기관 : 7개 자치구(도봉, 노원, 성북, 중랑, 동대문, 성동, 광진구)

연차별 추진현황

구 분	계	2013년	2014년	2015년	2016년
식재목표(천주)	385	17	121	125	122
식재물량(천주)	393	17	60	151	165
사업비(백만원)	8,665	1,208	2,738	1,854	2,865

Ⅲ		’16년 추진계획

추진개요

위    치 : 중랑천(성동구 송정제방 등 8개소)

사업규모 : 163,300㎡

사업내용 : 제외지내 녹음수 및 초화류 식재, 편의시설 설치 등

사업기간 : 2016. 1 ~ 12월

사 업 비 : 2,865백만원(주민참여사업 50백만원 별도)

추진기관 : 6개 자치구

사업대상지

자치구별	사 업 내 용	규모(㎡)	사업비 (백만원)
계	8개소	163,300	2,865
성 동 구	▸위치 : 중랑천(행당빗물펌프장 주변) ▸내용 : 고수호안 사면녹화(계절별 다양한 초화류 식재)	4,000	150
	▸위치 : 중랑천(송정제방 일대) ▸내용 : 송정제방 주변 특화거리 조성(수목 10,000주 식재)	1,300	150
	▸위치 : 중랑천(용비교~군자교) ▸내용 : 산책로, 자전거길 꽃나무 식재(수목 11,000주 식재)	5,400	100
광 진 구	▸위치 : 중랑천(군자교~장평교) ▸내용 : 둔치 녹화 및 초화류 단지조성(수목 10,000주 식재)	56,000	250
동대문구	▸위치 : 중랑천(군자교~이화교) ▸내용 : 제방 및 사면 녹화(수목 15,000주 식재)	19,600	250
중 랑 구	▸위치 : 중랑천(중랑교~장평교) ▸내용 : 제방 및 둔치 녹화(수목 41,000주 식재) ※ 주민참여사업(중랑천 둔치 꽃길 조성)은 세부실행 계획 수립 제출(50백만원)	15,000	704
도 봉 구	▸위치 : 중랑천(녹천교~의정부 시계) ▸내용 : 둔치 자전거길 그늘목 식재(수목 50,000주 식재)	38,000	761
노 원 구	▸위치 : 중랑천(월릉교~의정부 시계) ▸내용 : 둔치 수목 및 초화류 식재(수목 28,000주 식재)	24,000	500

추진일정

사업추진 계획 수립‧통보(자연생태과 ⇨ 자치구) : ’16. 1월

기술용역 타당성심사(자치구 ⇨ 기술심사담당관) : ’16. 2월

- 설계용역 타당성심사 결과 첨부(수리검토비 포함)하여 설계비 재배정 요구

실시설계 용역시행(자치구)                      : ’16.2~5월

- 기 시달한 중랑천 녹색브랜드화 기본계획에 맞추어 설계반영

- 중랑천 녹색브랜드화 추진 수목 식재 계획 지침에 의거 수종,규격 등 선정

- 중랑천 하천기본계획을 기준으로 수목식재 수리검토 시행 및 하천 관련 부서 협의

설계심의(자치구 ⇨ 자연생태과)                : ’16.4~5월

- 설계심의는 설계공정 70%정도 진행 시 자연생태과에 요청

- 설계심의는 대상지 여건 및 현황 등에 따라 현장 심의 가능

계약심사(자치구 ⇨ 계약심사과)                : ’16.4~6월

- 공사금액이 3억(조경)이상인 경우 시 계약심사과 심사 의뢰

- 공사금액 3억(조경) 미만은 기관 자체 일상감사 실시

- 심의결과 첨부하여 자연생태과에 공사비 재배정 요구

공사시행(자치구)                             : ’16.5~11월

- 자치구별 추진하는 공사는 연내 공사완료를 목표로 추진

추진지침

중랑천 전 구간을 구역별 특성에 맞게 특화 및 브랜드화

- 제방상부 식재수종 다양화 및 녹음 터널, 장미원 등 조성

- 둔치 체육시설, 산책로, 자전거길 주변 그늘 나무식재 및 의자설치

- 제방 호안 경사면 및 둔치 공지 자생식물 단지 및 초화류원 조성

- 하천 경관 저해시설(합류부 등) 정비 및 동부간선도로 차폐수목 식재

하천의 홍수관리 등 치수적 측면에서 중요부는 큰나무 심기 제한

- 수리계산이 필요없는 곳에 허용 식재 밀도를 고려하여 식재

- 하천 제외지내 큰나무 식재시는 실시설계 용역시 수리전문가 자문을 받아 시행

중랑천 녹색브랜드화 취지에 맞게 녹화 위주의 사업 추진

- 중랑천 녹색브랜드화 기본계획에 의한 자치구별 사업물량 준수

- 녹화를 위한 도입 수종은 기존 식생 및 하천 생육에 적합한 수종 선정

- 둔치 구간에는 유수에 지장을 주는 체육시설물, 편의시설 등 시설물 설치 배제

- 그 외 구간에도 의자 등 편의시설 외 시설물 설치 최소화

2016년 주요업무 추진지침(하천생태복원 및 녹화) 준수

- 하천에서 나무심기 및 관리에 관한 기준(국토해양부, 2007)

- 생태하천 복원사업 추진지침(환경부, 2012)

Ⅳ		행정사항

사업착공 및 준공시 5일 이내 사업내역 첨부 보고

자치구별 중랑천 녹색브랜드화 사업 사진 기록 철저

- 2013년부터 2016년까지 위치별, 공종별 전·후 대비 사진을 계절별 기록 관리

- 사업 전·후 변화 과정을 사진첩으로 제작하여 사업 완료 후 제출(원본파일 포함)

2016년까지 집중 추진하여 성과있게 마무리

- 자치구별 추진한 사업이 성과있게 마무리 될 수 있도록 계획 수립

- 사업 완료 후에는 시민참여 프로그램 등 유지관리 방안 강구

보도자료 제공, 준공식 등은 시(자연생태과)와 사전 협의

붙  임 : 사업착공 및 준공보고 서식 1부.

[붙임1]

○○○ 사업 착공 보고서

○ 공 사 명 :

○ 위    치 : ○○구  ○○동  ○○번지 일대 (000 ~ 000구간)

○ 공사기간 : 2015.   .   .~    .    .    .

○ 시 공 사 :

○ 공사금액 :       천원

- 도급:   천원,     관급:    천원,   기타:    천원

○ 공사내용 – 구체적으로 기재

-

-

-

-

○ 조성 대상지

위 치 도	현장사진

[붙임2]

○○○ 사업 완료 보고서

○ 공 사 명 :

○ 위    치 : ○○구  ○○동  ○○번지 일대 (000 ~ 000구간)

○ 사업기간 : 2015. ○.○~○.○

- 설계 : ○.○~○.○      , 공사 : ○.○ ~ ○ ○

○ 공사내용(구체적으로 기재)

-

-

-

○ 시민참여 실적 : 주민설명회 등(설계부터 완료까지 사항)

○ 언론보도 사항 : 보도자료 배포, ○○언론사 등 보도

○ 예산집행내역

(단위 : 천원)

예산과목	재배정액	집행액	잔 액
			소 계	집행잔액	낙찰차액
합 계
시 설 비
설계용역비

○ 준공사진

공사전	공사후