함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 책임사업관리자
(경유)
제목	지연배상금 이의제기 및 계약기간 연장 신청에 대한 회신

1. 뚝도(CM)2016-16(2016.01.19)호 및 뚝도(CM)2016-17(2016.01.19)호와 관련입니다.

2. 2계열 지연배상금 부과에 대한 의의제기 및 계약기간 연장 신청건에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

○ 시공사의 공사지연, 2계열 시설용량 미확보로 인해 발생한 계약상대자의 책임있는 사유에 해당하므로 지연배상금 부과 대상이며, 계약기간 연장은 불가함. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	송병욱		시설과장	김도섭		시설안전부장	02/02 강신재
협조자
시행	시설과-1014	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1435	/전송	3146-1529	/		/	대시민공개