문서번호	조경과-1458
결재일자	2016.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장		푸른도시국장
변동풍	조윤래	이원영		02/02 최광빈
협 조

2016년 가로변 녹지량 확충사업 추진계획

2016. 2.

푸른도시국

(조경과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 가로변 녹지량 확충사업 추진계획

가로변 유휴공지 발굴과 녹화를 통해 녹지량을 확충하고 소음, 대기오염 저감 및 쾌적한 가로환경을 제공하고자 함

1		추진방향

❍ 중앙분리대, 안전지대, 고가하부 등 가로변 유휴지를 적극 발굴하고 녹지로 조성하여 가로변 녹지량 확충 및 쾌적한 가로환경 조성

❍ 빗물이 유입될 수 있도록 조성하고, 시민이 쉴 수 있는 공간에는 의자 등을 설치하여 소규모 휴식장소 제공

❍ 보도 주변 유휴지에 키큰나무 모아심기로 가로숲(그늘목) 조성

❍ 단풍과 열매, 꽃 등이 아름다운 수종 적극 도입

2		사업개요

❍ 대    상 : 가로변 유휴공지(중앙분리대, 안전지대, 가로 유휴지 등)

❍ 사업규모 : 715천㎡

❍ 사업기간 : 1998년 ~ 2018년

❍ 사업내용 : 가로변 유휴지 녹지조성, 향토수종 및 지피식물 식재 등

❍ 총사업비 : 71,730백만원(기투자 64,072, 2016년 2,614, 2017년 이후 5,044)

3		그 간의 추진실적

❍ 기    간 : 1998년 ~ 2015년

❍ 규    모 : 녹지조성 및 정비 670천㎡(2015년 12천㎡)

❍ 사 업 비 : 64,072백만원(2015년 2,230백만원)

4		2016년 추진계획

□ 사업개요

❍ 대    상 : 성동구 천호대로 등 20개소

❍ 사업규모 : 44,730㎡

❍ 사업기간 : 2016. 2월 ~ 11월

❍ 사업내용

- 의자 등을 설치한 소규모 휴식장소 적극 조성

- 보도 및 가로변 유휴지에 키큰나무 가로숲(그늘목) 조성

- 단풍과 열매, 꽃 등이 아름다운 수종 적극 도입

- 가로변 녹지 조성할 경우 빗물유입 화단으로 조성

❍ 사 업 비 : 2,614백만원(시설비 2,611, 시설부대비 3)

❍ 예산과목 : 조경과, 생활주변 녹지확충, 녹지보전 강화, 가로수 생육환경 및 가로변 녹지량 확충, 시설비(401-01) /시설부대비(401-03)

□ 실시설계 : 자체설계 시행

❍ 근    거 : 기술심사담당관-106656(2011.7.8.)호 ‘기술용역 발주기관 자체시행 기준’

❍ 사    유 : 사업내용이 단순식재 및 시설물 설치 공종에 해당되는 경우 유사사례를 참고하여 자체 설계 시행

❍ 자체설계비 지원 : 현장조사 및 도면작성, 인쇄비 등 재배정

※ 재배정액은 개략금액으로 현장 실정에 맞게 산출 발주

※ 사업 내용이 복잡하여 불가피하게 실시설계용역 시행이 필요한 자치구는 ‘기술용역 타당성 심사결과’를 첨부하여 설계비 재배정 요청

□ 추진절차

① 도면작성비 등 재배정		② 설계용역 수행		③ 설계심의 요청
조경과 ⇨ 자치구		자치구(주민의견 수렴)		자치구 ⇨ 조경과
④ 설계심의 및 결과 통보		⑤ 설계심의 조치		⑥ 일상감사 및 계약원가심사
조경과 ⇨ 자치구		자치구		자치구 ⇨ 감사담당관 등
⑦ 공사비 재배정 요청		⑧ 공사비 재배정		⑨ 공사수행
자치구 ⇨ 조경과		조경과 ⇨ 자치구		자치구
⑩ 착공 및 준공(정산) 보고
자치구 ⇒ 조경과

□ 추진일정

❍ 2016. 2.      : 도면작성비 등 일괄 배정

❍ 2016. 3.~ 5. : 설계심의, 공사비 재배정

❍ 2016. 4.~11. : 공사시행

5		행정사항

❍ 가로변 녹지 조성은 [붙임 3.] 가로변 녹지량 확충사업 추진요령을 참조하여 설계

❍ 설계심의 자문의견 반영 및 계약원가심사 조치결과를 첨부하여 공사비 재배정 요청

❍ 지방재정법 개정(출납폐쇄 기간 단축)에 따라 늦어도 11월 중 완료

❍ 설계 및 공사 착공(준공) 후 5일 이내 착공(준공) 보고

붙임 1. 2016년 대상지 및 가내시액 내역 1부.

2. 2016년 대상지 현황 1부.

3. 가로변 녹지량 확충사업 추진요령 1부.

4. 착공(준공) 보고서식 1부.

5. 공사비별 도면작성비 등 적용금액 1부.  끝.