문서번호	공공재생과-1133
결재일자	2016.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	사업협력팀장	공공재생과장		재생정책기획관
김성만	황원근	홍선기		02/02 강맹훈
협 조
	주무관		천주영

『세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업』

기본 및 실시설계용역 기간 연장 보고

2016. 2

도시재생본부

(공공재생과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업』

기본 및 실시설계용역 기간 연장 보고

설계용역 진행중 전문가 자문과 정책회의 주요의견 반영에 따른 추가 설계기간이 필요함에 따라 설계용역 기간을 연장하여 업무 추진에 만전을 기하고자함

사업개요

❍ 용 역 명 : 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업 기본 및 실시설계

❍ 위    치 : 중구 태평로1가 60-6외 2 (부지 면적 : 1,088㎡)

❍ 계약금액 : 총차 900백만 원(1차 630백만 원)

❍ 건립규모 : 지하3층, 연면적 2,732㎡

❍ 용역기간 : 2015.11.10. ~ 2016. 4. 7.

❍ 설 계 자 : 건축사사무소 안 대표자 안종환 외 3

- Terminal 7 Architects 조경찬 대표(현상설계공모 당선, 미국건축가)

추진경위

❍ '15. 5.21.          : 현상설계공모 추진계획 수립

❍ '15. 6. 2.          : 사업계획 검토보고 (행정2부시장 방침)

❍ '15. 7.27. ~ 9.28. : 세종대로 역사문화 공간 설계공모 시행(도시공간개선단)

❍ '15.10. 6.          : 설계공모 당선작 발표

❍ '15.11. 9.          : 계약 체결, 착수(11/10)

❍ '15.11.19.          : 용역착수보고회

❍ '15.12. 2.          : 기술 및 정책자문회의 개최(3회, 12/2, 12/7, 12/29)

- 공간내부 동선계획 재조정 및 지상부 광장 접근성 강화 필요

- 지상부 광장계획은 성공회 전면부지와 인접한 면이 단절되지 않도록 설계

용역기간 연장사유

❍ 자문결과에 따른 계획 조정 및 도면 수정으로 인한 추가과업기간 필요

- 관련근거 : 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준 제14장 제7절 “2” (계약기간의 연장)

❍ 용역기간 연장 : 총 61일

구분	변경 전	변경 후	비 고
총차	'15.11.10. ~'16. 4. 7.	'15.11.10. ~ '16. 6. 7.	61일 연장
1차	'15.11.10. ~ '16. 2. 7.	'15.11.10. ~ '16. 3. 8.	30일 연장

❍ 연기 사유 귀책소재 : 서울특별시

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

❍ 처리의견 : 용역기간 연장이 타당하므로 용역기한 변경계약을 하고자 함

향후 계획

❍ '16. 3. : 기본 설계 용역 완료

❍ '16. 6. : 실시 설계 용역 완료

❍ '16. 7. : 공사발주

따로붙임 : 용역기간 연장 요청서 1부. 끝.