문서번호	총무과-4089
결재일자	2016.2.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
박교관		임철수	02/02 이혜경
협조

서울도서관 천장 마감재 보수 공사 착수 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  2.

서울도서관 천장 마감재 보수 공사 착수 보고

’15.11.19일 발생한 서울도서관 천장마감재 탈락 사고에 대한 보수 공법, 자문위원 및 시공 일정 등이 확정됨에 따라 보수공사에 착수하고자함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울도서관 천장 마감재 보수 공사

○ 공사기간 : `16. 2. 15 ~ 5. 15(3개월)

○ 공사범위 : 서울도서관 1~4층 천장 마감재(회반죽) 보수

○ 시 공 사 : 삼성물산 주식회사

※ 보수 공사비용은 시공사 부담으로 시행(공사비, 전문가 자문비용 등)

□ 현재까지 추진사항

○ ’15.11.19.(목) 16:30 … 도서관 3층 천장마감재(회반죽) 탈락

○ 긴급 안전조치 실시

- 11.23. : 긴급 안전조치 완료(3․4층 우선 조치)

- 12.07. : 추가 안전조치 실시(1․2층)

※ 수습 대책회의(전문가 자문 포함) 및 시공사 부서장 면담 : 총 6회

○ ’15. 12. 28.(월) : 안전조치계획 시장님 보고(시설안전과)

○ 공사계획수립

- 12.30. : 보수공법 및 일정 협의(총무과, 서울도서관, 도기본, 시공사)

- 01.15. ~ 02.01 : 관련부서협의 및 자문위원 위촉(역사문화재과)

□ 세부추진계획

○ 문화재전문가 자문 위원 위촉을 통해 보수공사 전반에 걸쳐 자문 실시

[전문가 자문시기]

- 회반죽 보양 및 해체 : 해체 전 자문결과에 따라 도면 작성

- 기존 회반죽 해체 : 회반죽 해체 후 문제점 등 파악

- 회반죽 바르기 : 초벌바름, 고름질, 재벌바름, 정벌바름 단계별 검측

자문위원 : 고주환(서울시 문화재 건축분과 전문위원)

안창모(문화재청 문화재전문위원)

○ 천장마감재 보수방법

- 크랙 · 들뜸 현상이 있는 1~4층 천장을 전면 철거 후 재시공

- 하자가 많은 전통공법 대신 현대적 공법(메탈라스) 결합 시공

[검토의견] - 역사문화재과

- 등록문화재는 외관에 대한 변경만을 제한하고 있으므로, 내부 천장 마감재 보수에 관한 사항은 추진부서에서 자문위원의 자문 받아 시행.

- 다만, 준공시 준공보고 및 수리보고서를 역사문화재과에 제출

○ 부서별 업무분담

부 서	업 무 내 용
행 정 국	보수공사 관리, 제반 행정절차 진행
도시기반시설본부	보수 공사 감독
서울도서관	보수공사에 대한 안내 및 이용 시민 불편해소 방안 검토 등

○ 예정공정표

□ 향후계획

○ ’16. 2. 2 : 보수공사 착수 통보(총무과→도시기반시설본부, 서울도서관)

○ ’16. 2. 15 ~ 5. 15 : 보수 공사 시행

붙 임 : 서울도서관 천장 마감재 보수 공사 착수 보고서 1부.  끝.