문서번호	정수시설과-441
결재일자	2016.2.3.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
★주무관	정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
장현순	윤종민	02/03 최석기
협 조
	주무관		변병수

1정수지 유출밸브실 장비반입구 확장 설치공사에 따른 실정 보고

2016. 2.

뚝도아리수정수센터

1정수지 유출밸브실 장비반입구 확장 설치공사에 따른 실정보고

우리정수센터 1정수지 유출밸브실 장비반입구 확장 설치공사 추진중 변경 사항 발생에 따른 실정보고임.

□ 현 황

○ 공사 규모

위 치	장비반입구 확장	경량덮개	흡수정 임시개구부	터파기	비고
제1정수지	2.0×1.2m⇒4개소	2.0×2.6m⇒2개소	0.7×2.5m⇒1개소	4.0㎥

○ 공사 전경

1정수지 장비반입구 거푸집 설치	흡수정 코아드릴 천공

□ 보고 내용

○ 일부 작업공종 물량 증가 발생

- 콘크리트 인력비빔 타설 0.6㎥ ⇒ 1.6㎥

- 합판거푸집(보통) 2.6㎡ ⇒ 9.6㎡

- 마감미장 2.2㎡ ⇒ 4.0㎡

- 콘크리트 절단 23.0m ⇒ 43.0m

- 코어드릴천공(바닥100㎜, T=300㎜) 2개소 ⇒ 14개소

○ 신규 작업공종 발생

- 현장정리 32.0㎡

□ 조치 계획

○ 1정수지 유출밸브실 장비반입구 확장 설치공사에 따라 불가피하게 변경사항 발생된 작업공종들에 대하여 추후 설계변경 및 정산반영 조치

○ 소요예산은 정수비, 수선유지교체비(기타교체비) 활용

붙임 : 설치계획 보고서 1부.  끝.