문서번호	도로보수과-628
결재일자	2016.2.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	남부도로사업소장
정철식		김준섭	02/03 이덕기
협 조
	주무관			한수영
	주무관			박영권

소성변형구간 일제조사 결과보고

(버스전용차로 및 교차로)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 2. 3

도로보수과

버스전용차로 및 교차로 소성변형 일제조사

차도혁신 종합대책 관련 중차량 통행으로 인한 버스전용차로 및 교차로 구간의 소성변형이 발생한 구간에 대해 일제조사한 결과 보고임.

※ 관련근거 : 도로관리과-1307호(2016.1.22.) 버스전용차로 및 교차로 소성변형 발생구간 일제조사 실시

차도혁신 종합대책 검토(행정2부시장방침 제321호, ‘15.9.21)

Ⅰ		조사내용

□ 조사대상 : 버스전용차로 및 교차로 소성변형(rutting)구간

□ 조사기간 : 2016.1.25. ~ 29 (5일간)

□ 점 검 조 : 각 관할구역(2명 1개조)

❍ 관악구, 동작구 : 정철식, 조경현

❍ 서초구 : 박영권, 홍민표

❍ 영등포구, 금천구 : 한수영, 박병규

Ⅱ		조사결과

□ 버스전용차로 : 4개소(일반전용차로 1개소, 중앙버스 3개소)

❍ 연장 470m, 면적 15.6a

□ 교차로 : 15개소

❍ 연장 580m, 면적 32.3a

Ⅲ		조치계획

□ 정   의

❍ 소성변형 : 차륜통과 위치에 따라 아스팔트 노면에 골이 패인 현상

□ 원   인

❍ 환경요인 : 과적차량, 교통정체, 이상기후(고온)

□ 단기 대책

❍ 노면절삭 또는 절삭후 덧씌우기

□ 장기 대책

❍ 시공두께 결정

-코아채취등을 통한 시공두께 결정(필요시 포장연구센타 자문)

-버스전용차로와 교차로 포장두께 구분

※ 2015년도 시행 (중앙버스차로 : 승강장 20cm, 주행차로 12.5cm)

(일반도로 교차로 : 10cm)

❍ 골재입도개선

-PSMA포장 실시

Ⅳ		향후계획

□ 2016. 4 : 필요구간 노면절삭 시행(단기대책)

□ 2016. 4~5 : 시공두께 결정 및 자재구입

□ 2016. 6 : 절삭 후 재포장 실시

- 2016년 포장도로 유지보수공사(B구역) : 대림사거리(2개소)

- 2016년 도로파손 긴급복구공사(연간단가) : 기타 구간(17개소)

붙임 : 1. 일제조사 목록(버스전용차로 및 교차로) 1부.

2. 점검 현황사진 19부. 끝.