문서번호	산악구조대-447
결재일자	2016.2.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	산악구조대장	119특수구조단장
박영철	민원석	02/03 김재학
협 조	행정지원과장		권태미
	담당자		성재욱
	3팀장		이상수
	3팀장		오세문
	3팀장		김광철

- 서울시계 산악지대 안전 확보 -

산악구조대 전진기지 환경개선 및 급수공사 예산집행 계획

119특수구조단

【 산악구조대 】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	도봉구청 관악구청 국립공원관리공단
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

산악구조대 전진기지 환경개선 및 급수공사 예산집행 계획

산악구조대 근무특성에 따른 하우스형 컨테이너 청사를 운영함에 있어 급수시설 및 화장실 등 사용상 어려움을 해소하기 위하여 전진기지(청사) 내 급수공사 및 환경개선공사 등을 실행하기 위한 계획임.

Ⅰ		관 련 근 거

산악구조대-94(2016.1.7.)호「산악구조대 예산집행 추진계획」

행정지원과-17197(2015.12.18.)호 「2016년 예산집행 추진 계획 수립 관련 관계자 회의안내」

2016년 성과주의 예산서

Ⅱ		현실태

지하수 이용으로 인한 수질 불량, 수량 부족 및 동절기 지하수관 노출에 따른 동파 발생

화장실 부재로 인한 외부 화장실 이용의 어려움 발생

하우스형 콘테이너(청사)내 사무공간 부족

Ⅲ		예산현황

예산현액 : 96,670천원

예산과목 : 특수구조단운영/ 산악구조대운영/ 시설비(405-01)

Ⅳ		세부추진계획

산악구조대 (관악산) 급수공사

○ 품    목 : 급수공사

○ 예 산 액 : 75,170천원

○ 추진계획

- 계약방법 : 전자공개 수의계약

- 계획수립, 입찰 및 계약 : 2016. 1. 15. - 4. 30.

- 공사진행 및 완공지급 : 2016. 5. 01. - 7. 30.

산악구조대 (도봉산) 환경개선공사

○ 품    목 : 환경개선공사

○ 예 산 액 : 21,500천원

○ 추진계획

- 계약방법 : 전자공개 수의계약

- 계획수립, 입찰 및 계약 : 2016. 1. 15. - 4. 30.

- 공사진행 및 완공지급 : 2016. 5. 01. - 7. 30.

※ 급수 및 환경개선 공사 동시 작업을 위해 일정 변경함.

세부추진일정

단 계		일 정		주 요 내 용
관계기관 협의 및 허가승인		1~2월 중		◦공사에 따른 관련법령 등 사전조사 ◦각 산별 해당 관계기관 협의 및 허가사항 승인
일상감사				해당 없음
⇩
사전조사 및 설계용역		3월 중		◦각 산별 공사를 위한 사전조사 및 시장조사 ◦공사 설계용역 발주
⇩
입찰 공고 및 계약 체결		4~6월 중		◦공사 입찰 공고 및 계약체결 ◦공사 착공
⇩
준공확인 및 대금지급		7월 중		◦공사감독공무원 지정 및 준공검사 ◦대금 지급

※ 관계기관 협의 및 허가승인

○ 공통사항 : 가설물축조 산지점용허가 협의(관할구역 구청)

○ 도봉산 화장실 설치관련

- 국립공원 내 시설물 설치 협의(국립공원관리공단 도봉사무소)

Ⅴ		향후 추진계획

장기적 산악구조대 청사 운영에 필요한 환경개선 작업공사 진행

집행잔액 발생 시 원활한 전진기지 운영에 필요한 사항 추가 진행.  끝.