문서번호	토목부-2408
결재일자	2016.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
홍상필		권혁대	02/04 김영수
협조

파일 천공홀 복구방법 검토보고

(서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사)

2016. 2.

도시기반시설본부

(토목부)

파일 천공홀 복구방법 검토보고

(서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사)

임시가설교량 철거시 기초파일 인발에 따른 천공홀에 대한 복구방법 검토보고임

1		관련근거

❍ 한종(서빙고) 제16-007호(2016. 1.29.) 실정보고

2		공사개요

❍ 위    치 : 용산구 보광동 ~ 주성동(두무개길 ~ 강변북로)

❍ 규    모

- 기존고가 철가 : B=16m, L=510m

- 고가설치 : B=6.4, L=115m / B=10.4, L=290m

❍ 공사기간 : 총괄 2011. 1. 6. ∼ 2016. 4.30.(5차 2015. 3. 2. ~ 2016. 4.30.)

❍ 도 급 비 : 총괄 20,882백만원(5차 8,270백만원)

❍ 감 리 사 : ㈜한국종합기술 외 1    ❍ 시 공 사 : 주식회사 흥화 외 1

3		감리단 보고내용

❍ 현 황 및 문제점

1) 기초파일 설치 및 철거비는 설계에 반영되어 있으나, 복구에 대한 방법          및 복구비는 설계에 미반영 됨

2) 기초파일이 설치되어 있는 구간은 철도 선로와 인접해 있거나 향후 도로로  사용될 구간으로 지반변위 등으로 도로 침하 및 철도지반 변위 발생 우려가 있음

❍ 복구방법

1) 유사 관련규정

- 가설공사 표준시방서(2014, 국토교통부) 제7장 가설교량 및 노면복공

· 3.2.6 노면복공 철거 (7) 말뚝구멍은 말뚝길이의 1/2이상의 깊이까지               모르타르를 투입한다. 벤토나이트 모르타르는 노면 아래 1.2m 이상               충전하여야 한다.

2) 복구방법

- 모래채움 : 천공깊이의 1/2

- 몰탈채움

· 포장부 : 천공깊이의 1/2에서 레미콘 및 포장층(T=1.2m) 제외

· 노출부 : 천공깊이의 1/2에서 레미콘 타설(T=1.2m) 제외

- 레미콘 타설

· 포장부 : T=85Cm(포장층 T=35Cm 제외)

· 노출부 : 지면아래 1.2m

※ 유사 관련규정에는 노면아래 1.2m 이상 벤토나이트 모르타르 충전이나,        당현장은 자재비를 고려하여 con’c(18Mpa)적용

- con’c : 57천원/㎥, 벤토나이트 : 140천원/㎥

- 복구 단면도

3) 기술지원감리 검토의견

- 파일 천공홀에 대한 복구가 없을 경우 지반 변위 발생 우려가 있음

- 가설교량 기초파일 구간이 향후 도로사용 및 철도 선로 인접구간으로            천공홀에 대한 복구를 철저히 시행

- 파일 천공홀 복구방법(모래채움 + 몰탈 +콘크리트)은 적정함

❍ 적용단가 검토 및 공사비 증·감 현황

- 적용단가 검토

· 신규공종 : 낙찰율 81.57% 적용

[H-pile 뽑은후 되메우기(H-350, 강관파일)]

· 기존공종 : 기존단가 적용

[H-pile 뽑은후 되메우기(H-300), 몰탈채움, 무근콘크리트 타설]

- 공사비 증·감 현황

공 종	규 격	단위	수 량			공사비(천원)			비고
			당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
부대공
1.1 가설교량공
a. H-pile 뽑은후 되메우기	H-300	㎥	0	888	888	0	183	183
b. H-pile 뽑은후 되메우기	H-350	㎥	0	473	473	0	186	186
c. 강관파일 뽑은후 되메우기	φ508	㎥	0	667	667	0	158	158
d. 몰탈 채움		㎥	0	21	21	0	3,536	3,536
e. 무근콘크리트타설		㎥	0	55	55	0	810	810
직접공사비						0	4,873	4,873
제경비						0	2,567	2,567
공급가액						0	7,440	7,440
부가가치세						0	744	744
도급금액						0	8,184	8,184
관급자재						0	3,161	3,161
총공사비						0	11,345	11,345

- 관급자재비

공 종	규 격	단위	수 량			공사비(천원)			비고
			당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
관급자재
1. 레미콘	25-18-80	㎥	0	55	55	0	3,144	3,144
소 계						0	3,144	3,144
조달수수료	0.54%					0	17	17
합 계						0	3,161	3,161

4		검토의견 및 조치계획

❍ 파일 천공홀 복구에 대한 감리단의 검토내용이 적정함으로 승인하고

❍ 향후 설계변경시 반영하고자 함

붙  임 : 감리 검토의견서 1부.  끝.