투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기 요청(돈화문 국악예술당 건립 기계설비공사)

1. 설비부-1825(2016.2.4.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인 ‘돈화문 국악예술당 건립 기계설비공사’와 관련,

아래와 같이 관급자재 납품기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 납품기한 연기 내용

품 명	납품요구번호 (계약번호)	계약업체	계약금액(원)	납품기한		비 고
				당 초	변 경
냉·난방기 (EHP)	121523698000 (00148142801)	엘지전자㈜	819,000	2016.02.16.	2016.03.31.
냉·난방기 (EHP)	121523690200 (00158118201)	〃	20,043,300	2016.02.16.	2016.03.31.

나. 연기 사유 : 선행 공종(건축) 준공 일정상 관급자재 납품시기 미도래

다. 납품연기 귀책 사유 : 본부

라. 지체상금 부과 여부  : 미부과

따로 붙임  납품기한 연기 관련 문서(연기 동의서 포함) 1부.  끝.

	설비부장
주무관	박경철		시책사업과장	임현근		설비부장	02/04 권오식
협조자
시행	설비부-1852	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8647	/전송	3708-8659	/	pkc6896@seoul.go.kr	/	부분공개(6)