준공기한 연기 보고

결재	주무관	시설관리과장
	함인석	02/04 代송종범

	명에 의거 담당 구역내 급수공사를 시행하던 중 아래와 같이 준공기한 연기 사항이 있어 보고합니다.
2016. 2.
보 고 자 : 직 성명 : 지방시설주사보 함인석

보 고 내 용
건 명	준공기한 연기 보고(신설-18, 명일동 343-6외2필지)
내용	1. 위 치 : 명일동 343-6외2필지(신설 18) 2. 급수공사 종별 : 신설 3. 보고내용 - 상기 위치에 작업지시 하였으나, 수요가에서 내부 설비공사가 미완료되어 공사일정 연기를 요청한 사항임. 5. 조치의견 - 상기 위치의 급수공사 준공기한을 아래와 같이 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자합니다. ◆ 당초 공사기간 : ’16. 2. 3 ~ 2. 6 ◆ 변경 공사기간 : ’16. 2. 3 ~ ’16. 2. 23 6. 지체상환금 부과여부 : 미부과
비 고