문서번호	시설과-552
결재일자	2014.1.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설과장	급수부장
라승보	이임섭	전결 01/24 이상홍

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사』

세그먼트 볼트박스 몰탈 주입

물량 누락 실정보고 검토 보고

2014. 1.

급   수   부

(시 설 과)

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사』

세그먼트 볼트박스 몰탈 주입 물량 누락 실정보고 검토

올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사와 관련하여 터널내부 상수도강관과 세그먼트사이 몰탑 주입 물량 산정시 세그먼트 볼트박스 체적이 누락되어 이에 대한 실정보고 검토임.

사업개요

○ 공사규모 : 송수터널      D=2200mm, L=1,426m

송수관 부설 D=1500mm, L=1,511m

○ 공사기간 : ’11. 9. 8  ～  ’14. 4. 5(3차분 ,13.1.1 ~ ,14.2.6)

○ 시 공 사 : 중흥건설(주) 외 1개사

○ 감 리 사 : (주)건화

시공사 실정보고

○ 실정보고 내용

- 상수도강관과 세그먼트 사이 빈공간 채움 몰탈 수량 산출시 세그먼트 볼트박스 체적이 누락되어 당초 설계보다 몰탈 주입량 증가.

- 몰탈채움량 88㎥증가(자재 할증포함 90㎥증).

- 공사비(도급비) 9,753천원 증.

책임감리원 검토

※ 관련문서 : 세그먼트 볼트박스 몰탈 주입 물량 누락 실정보고<건올감 2014-24, 2014.1.20>

○ 검토내용

- 설계 현황

․ 당초 뒷채움 몰탈 수량산출시 세그먼트 볼트박스(Hole) 체적을 누락 시켜 산출됨(몰탈 사급자재)

- 현황 도면

터널 표준 단면	세그먼트 표준단면

- 누락된 세그먼트 볼트박스 주입 몰탈 수량 산출 내용

․ 세그먼트 1링(1m)당 볼트 박스 개수 : 42개소

(대차운행 간섭 세그먼트 볼트박스 수량(4개소)제외)

․ 세그먼트 총수량 : 1,433링

․ 총 볼트 박스 수량 : 42개소 × 1,433링 = 60,186 개소

․ 누락된 몰탈 체적

: 60,186  × 0.001465(볼트박스 1개소체적) = 88㎥(할증포함 90㎥)

- 수량 및 공사비 증감

구 분	당 초	변 경	증 감
몰탈 채움(㎥)	2,838	2,926	88
몰탈 사급자재(㎥)	2,895	2,985	90
직접공사비(천원)	224,169	231,132	6,963
간 접 비(천원)	89,843	92,634	2,790
도급 공사비(합계)	314,012	323,766	9,753

○ 책임감리원 검토의견

- 당초 설계 수량 산출시 세그먼트 볼트박스에 주입되어야 할 몰탈 수량을 누락하여 산출되었으므로,

- 누락된 몰탈 수량은 추후 계약변경 심의를 거쳐 설계 변경시 반영함이 타당할 것으로 사료됩니다.

※관련규정 : 『공사계약일반조건 Ⅵ절.1.가.1)』

“설계서의 내용이 불분명하거나 누락․오류에 의한 설계변경”

공사관리관 의견

○ 실정보고 내용을 검토한 결과 누락된 세그먼트 볼트박스 채움용 몰탈량 추가 반영은 타당하나, 증가되는 몰탈량 산정시 몰탈배관 거치대, 관받침대, 부력방지대, 몰탈 및 공기배관 체적을 고려치 않았음.

○ 따라서 향후 이 건에 대한 계약금액 조정 심의시 위의 체적(9.94㎥)을 공제하고 계약금액 조정 및 정산 조치코자 함.

- 누락된 몰탈 주입량 재 산정 : 88㎥ - 9.94㎥(≒10㎥) = 78㎥

첨 부 : 실정보고서 1부.  끝.