『공사연기 보고서』

문서번호	결재	주무관	지방시설사무관대우	급수운영과장
급수운영과-2285		유강현	이승완	02/04 이계환

명에 의거 『노원구 관내 급수공사(연간단가)』 감독업무 수행중 아래와 같은 사항이 발생되어 보고합니다.

2016. 2. 4.

보고자 : 지방시설서기보 유강현

□ 현  황

○ 공 사 명 : 2015년 노원구 관내 급수공사

○ 위    치 : ******************************

○ 도 급 자 : **************

○ 공사개요 : D=300mm, L=120m

○ 공사기간 : 2015. 12. 25. ~ 2016. 2. 05.

□ 보고내용

○ 노원구청에서 시행하는 ********************** 도로개설 구간에 대하여 상수관로부설을 작업지시(2015.12.15)한 뒤 동절기 작업 중단 상태로 공사를 연기(2016.02.05)하였으나,

○ 노원구청 도로개설의 작업일정이 변경됨에 따라 부득이 공사기간내 준공이 불가능한 실정임.

□ 처리의견

○ 상기와 같이 공사기간내 공사완료가 불가능하므로 당초 공사기간을 아래와 같이 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

- 공사기간

(당초) : 2015. 12. 15. ~ 2016. 2. 5.

(변경) : 2015. 12. 15. ~ 2016. 3. 4.  끝.

부분공개(6)