문서번호	급수운영과-1272
결재일자	2014.1.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
이덕규		이경재	01/24 우종근
협조

'14년 배급수관 정비사업

구간변경 보고

강동수도사업소

(급수운영과)

배급수관 정비공사 구간변경 보고

누수방지과-31(2014.1.2.)호로 ‘14년 배급수관 정비공사 사업계획 심사결과를 득한 아래 공사의 구간변경사항이 발생하여 아래와 같이 보고함.

현    황

○ 공 사 명 : 송파동 8-2외5개소 세척갱생관 정비공사

○ 공사개요 : D=20~200mm, L=1,560m

○ 위    치 : 2구간 - 송파구 송파동 32~21-6(D=200mm, L=440m)

보고내용

○ 위 공사의 설계도면 작성을 위하여 현장조사한 바 2구간 송파동 32~21-6호 구간은 하수박스가 도로우측으로 치우쳐 있어 첨부도면과 같이 상수도관을 부설할 공간이 없는 실정임

○ 동블록(광암28블록)중 송파동 31-2~47-4호 구간은 위 구간과 연장 및 구경이 같은 세척갱생관[1982(92)/CIP/Φ200]이 매설되어 있음.

보고자 의견

○ 기존 2구간 송파동 32~21-6호 구간을 송파동 31-2~47-4호 구간으로 변경설계하고 위 사항을 본부 누수방지과에 보고하고자 합니다.

첨부 : 1. 현황도 및 위치도 각1부.  끝.