투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	준공기한 연기요청 (919공구 건설폐기물처리용역(총괄))

1. 도시철도토목부-1350호(2016.2.2.)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 『서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사 건설폐기물처리용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사 건설폐기물처리용역

나. 계 약 자 : 문화기업㈜  대표 박해경

다. 계약금액 : 1,355,220,000원(총괄)

라. 용역기간 : 2010.08.27. ~ 2016.02.17.(총괄)

마. 폐기물처리용역 기간 변경(총괄 4회)              (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감
용역비 (총괄)	1,355,220,000	1,355,220,000	변경없음
용역기간 (총괄)	2010.08.27 ~ 2016.02.17	2010.08.27. ~ 2017.02.17	12개월 연장

바. 변경사유

- “서울지하철9호선 3단계 919공구 건설공사”의 준공기한 연장에 따른 폐기물 배출계획을 반영하여 용역기간 연장

첨부 : 1) 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2) 감리 검토보고서 1부.

3) 준공기한 연기 의뢰서 1부.

4) 합의각서(총괄) 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	조태현		궤도과장	윤방식		도시철도토목부장	02/04 김진팔
협조자	주무관	정중규		계약2팀장	홍연화
시행	도시철도토목부-1495	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 9층	/
전화	02)772-7124	/전송	02)772-7306	/	cthhsh@seoul.go.kr	/	대시민공개