함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	서울특별시
수신	서울지방국토관리청장(하천계획과장)
(경유)
제목	하천점용허가 공사기간 연장 신청

1. 국토관리청 하천계획과-4376(‘13.12. 3.)호와 관련입니다.

2. 우리시에서 추진하는 서울매력명소 한강 스토리텔링 사업 중 4대 공원(여의도, 난지,반포,뚝섬) 이야기패널 설치와 관련하여 아래와 같이 하천점용허가 공사기간 연장을 아래와 같이 신청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 한강스토리텔링 이야기패널 설치·운영

○ 사업기간 : 2013.12. ~ 2014. 2.

○ 장    소 : 여의도, 뚝섬, 반포, 난지한강공원 일대

○ 수    량 : 총 30개(디자인 패널 3개)

□ 공사기간 연장신청

○ 공사기간 연장

- 기 존 : ‘14. 1. 7. ~ ’14. 1.31.

- 연 장 : ‘14. 1. 27. ~ ’14. 2.28.

○ 연장사유 : 공사기간 부족에 따른 연장 신청

※ 세부내용 붙임참조(서식 32호)

붙임     1. 하천점용허가 기간연장 신청서 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	진옥현		관광자원발굴팀장	김숙희		관광정책과장	01/24 박진영
협조자
시행	관광정책과-929	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문동 5층	/
전화	02-2133-2816	/전송	02-2133-1067	/	zeze6@seoul.go.kr	/	대시민공개