문서번호	설비부-955
결재일자	2014.1.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
이호기		이달영	01/24 박기형
협조
	환경시설과장		박희천

『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』

2014년 사업비 집행계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  01.

도시기반시설본부

(설  비  부)

『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』

2014년 사업비 집행계획

우리본부에서 시행중인 『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』의 2014년 사업비 집행계획을 수립 시행코져 함.

공사개요

□ 공 사 명 : 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업

□ 위   치  : 강서구 양천로 201(서남물재생센터 내)

□ 공사규모 : 분뇨처리시설 4,000톤/일 신설

기존처리시설 철거 및 상부공원화

□ 공사기간 : '12.11.15 ~ '15. 02. 02

□ 총도급액 : 63,470백만원

□ 시 공 사 : 대림산업(주)  / 감리사 : ㈜도화엔지니어링

□ 공사비 현황                                    (금액 : 백만원)

구 분	총 차	1 차	2 차	2014년	비 고
공사금액	63,470	4,022	11,317	13,782	관급비 제외
공사기간	‘12.11.15 ~‘15.02.02	‘12.11.15 ~‘13.04.30	‘13.4.19 ~‘14.02.28

2014년 사업비 집행계획

□ 예산현황(‘2014년)                               (금액 : 백만원)

사업비계	시설비	감리비	시설부대비	비 고
22,120	21,230	870	20

- 예산과목 : 도시안전실 물재생시설과, 물재생시설 개선 및 관리, 물재생시설개선, 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업, 시설비 및 시설부대비, 시설비

□ 집행계획                                     (금액 : 백만원)

항 목		공 종	금액	집행예정 시기	비고
시설비	도급공사	토목공사	7,752	2014년 1월
		전기공사	508	2014년 8월
		기계공사	5,522	2014년 8월
		소 계	13,782
	폐기물처리비		21	2014년 3월
	직접구매자재비	토목(레미콘)	1,284	2014년6월
		전기(수배전반 외)	2,190	2014년6월
		플랜트(농축기 외)	3,953	2014년3월
		소 계	7,427
	계		21,230
감 리 비			700	2014년3월
합 계			21,930

검토의견

□ 21014년도 토목공정은 주로 구조물 설치로 계획되어 토목공사의 일체화를 위하여 현재 진행중인 2차공사에 포함 설계변경하여 집행하고,

□ 기계, 전기공사는 구조물 공사 공정에 따라 8월에 발주하고, 직접구매 대상품목 중 레미콘, 플랜트 자재 및 수배전반 등은 3월부터 구매하되 제작기간 및 현장 여건 등을 고려하여 구매시기 조정 시행코져 함.

붙 임 : 1. 감리단 2014년 예산 집행계획 제출 1부.

2. 방재안전시설부 2014년 사업비 집행계획 검토의견 1부.  끝