문서번호	설비부-1916
결재일자	2016.2.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
유영선	임현근	02/05 권오식

- 돈화문 국악예술당 건립 통신공사 -

설계변경에 대한 실정보고 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  2.

도시기반시설본부

[ 설 비 부 ]

- 돈화문 국악예술당 건립 통신공사 -

설계변경 실정보고 검토 보고

「돈화문 국악예술당 건립 통신공사」와 관련하여 감리단으로부터 제출된 실정보고에 대하여 검토하고 보고 드림.

1. 공사개요

○ 공사규모: 지하3층/지상1층, 연면적 1,773㎡

- 구내 통신설비, AV 및 TV 설비, CCTV설비, 출입통제 및 비상버튼설비, 무대음향설비

○ 도급금액: 312,708,000원(3차: 222,862,000원)

○ 시 공 사: ㈜에스앤티에스 대표 이청대

○ 감 리 사: ㈜영화키스톤건축사사무소 대표 김인구

2. 관련근거

○ 돈화문감 제16-00호(2016.02.05.)

- 운영기관 등 협의결과에 따른 통신공사 실정 보고

○ 건축부-14338호(2015.12.15.)

- 돈화문로 국악예술당 운영기관 등 협의결과 통보

3. 설계변경 주요내용

○ 설계변경 내용(요구사항 반영)

구 분	당 초	변 경	비 고 (천원)
무대부 통신수구 위치 변경	무대중앙 좌우측 설치	- 비용 증가 없이 무대 바닥 매입시공(시스템박스 공동 이용)	-
안내 데스크 통신회선 설치	- 미 반영	- 안내데스크에 반영하여 시공	-
무대감독실 설치 (카메라, 모니터, 인터컴, 스피커)	- 미 반영	반영하여 시공	증) 8,812
로비 모니터, 영상분배기외	- 미 반영	반영하여 시공	증) 11,637
음향 UPS, 마이크 외	- 미 반영	반영하여 시공	증) 49,529

구 분	당 초	변 경	비 고 (천원)
녹화 및 편집시스템	- 미 반영	- 반영하여 시공	증) 5,633
행사용음향장비 (스피커,앰프,믹서,CDP)	- 미 반영	- 반영하여 시공	증) 10,884
빔프로젝터	- 미 반영	금액 상승의폭이 커 본 공사에서는 프로젝터를 설치할 수 있도록 기반시설만 구축	증) 11,593

○ 단가적용 검토

- 기존 물량 증감	: 계약단가 적용

- 신규 공종	: 설계단가에 낙찰율(86.884%) 적용

○ 공사비 증감 검토	(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
1. 재료비계	125,778	205,437	증) 79,659
2. 노무비계	93,238	113,142	증) 19,904
3. 경 비 계	29,669	39,792	증) 10,123
4. 일반관리비, 이윤	35,595	47,667	증) 12,072
5. 공사원가	284,280	406,038	증) 121,758
6. 부가가치세	28,428	40,604	증) 12,756
7. 공급금액	312,708	446,642	증) 133,934

4. 감리원 검토의견

○ 위 실정보고 내용과 같이 변경하여 공연장 운용에 적합하도록 변경하고 내역 단가산정 등 설계변경내역, 공사비 증감내역 등이 적정한 것으로 판단 됨.

5. 보고자 의견

○ 운영기관의 요구사항을 반영한 공연장 음향설비 추가 및 평면변경 등에 따른 실정보고 내용이 타당하다고 판단되어 실정보고 사항을 승인하고,

○ 공사비 증액(5,000만원 이상)에 따른 설계변경소위원회 심의를 받아 설계변경 처리하고자 함.

따로붙임 : 감리원 실정보고 공문  1부.  끝.